문서번호	교통운영과-23704
결재일자	2017.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
오인숙		박동욱	12/11 代서인석
협조
	주무관		이민영

천호대로 연장 중앙버스전용차로 모니터링용역 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.12

교통운영과

천호대로 연장 중앙버스전용차로 모니터링용역 변경 보고

천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사 시행기관인 도시기반시설본부에서 개통일정을 변경 통보함에 따라 본 용역에 관한 현안사항을 보고드림

Ⅰ		개 요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 천호대로 연장 중앙버스전용차로 모니터링 용역

○ 과업구간 : 광진구 아차산역~강동구 천호대교 남단(2.6km)

○ 용역기간 : 2017.11.14.~2018. 5.12.(180일)

○ 계약업체 : ㈜서우TEC

○ 계약금액 : 금29,242천원

□ 추진경위

○ ‘17.11.14  천호대로 연장 모니터링용역 착수

○ ‘17.11.30. 천호대로 중앙버스전용차로 개통일정 변경 통보

(도시기반시설본부→교통운영과)

Ⅱ		현안 사항

□ 관련근거

○ 도시기반시설본부 토목부-25003(2017.11.29.)

『천호대로(광나루역)확장공사』중앙버스전용차로 개통일정 변경통보

□ 공사관련 현안사항

○ 경계석 수급지연으로 중앙버스전용차로 개통계획 차질

- 설계수량의 48%반입(중앙차로 정류소 경계석 미반입)

○ 보도공사 Closing11 에 의거 보도구간 마무리 불가

- 경계석 파동으로 11월까지 버스 정류소구간 등 마무리 불가

○ 중앙버스전용차로 개통일정 변경(‘17.12→‘18.4월말)

- 잔여공사 일정 및 동절기 공사중지 기간을 감안하여 중앙버스전용차로 개통시기 변경

Ⅲ		조치 계획

□ 조치방향

○ 천호대로 연장 중앙버스전용차로 공사일정과 연계하여 모니터링용역 일정 변경

⇒ 천호대로 연장 모니터링 용역 중지 및 용역기간 연기

□ 용역기간 변경

○ 용역 중지 기간 : ‘17.12.13~‘18.3.13(90일)

구 분	용역 기간
변경 전	2017.11.14.~2018. 5.12
변경 후	2017.11.14.~2018. 8. 9(용역중지기간 90일 포함)

Ⅳ		향후 계획

□ 향후 일정

○ ‘17.12. ~ ‘18.3  모니터링 용역 일시중지

○ ‘18. 3. ~ ‘18.8  용역재개 및 모니터링 시행

붙임 : 관련공문 1부. 끝.