문서번호	방재시설부-20989
결재일자	2017.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
윤석채		김인숙	12/11 남궁용
협조

- 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계) -

계약변경 요청에 대한 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

방재시설부

- 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계) -

계약변경 요청에 대한 실정보고 검토

「경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)」와 관련 계약변경 요청에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 선진경춘(감) 제2017-986(2017.12.08.)호

Ⅰ

용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)

○ 내    용 : 공원조성 (조경/토목/건축/기계/전기/정보통신/폐기물처리용역 등)

○ 용역기간 : 2015.04.13.~2017.12.31. (2차 : 2016.08.01.~2017.12.31.)

○ 용 역 비 : 1,492,040,000원 (2차 : 808,453,000원)

○ 용 역 사 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 등 3개사

Ⅱ

보고내용

○ 직접인건비 및 용역기간 조정 검토

- 경춘선 3단계의 절대공기(2018.06.30.) 등 현장여건 감안하여 원활한 공사추진을 위한 건설사업관리기술자 투입개월수 변경 필요

<직접인건비 중 상주기술자 투입개월수 변경 현황(전체분)>

분 야	등 급	전 체 분 (단위 : 개월)			비 고
		당 초	변 경	증 ․ △감
책임건설사업관리기술자	고 급	33.00	41.00	증) 8.00
조 경	중 급	14.33	22.33	증) 8.00
조 경	초 급	2.00	2.00	-
토 목	중 급	29.50	37.50	증) 8.00
토 목	초 급	16.73	15.49	△ 1.24
건 축	중 급	12.85	12.85	-
기 계	중 급	2.50	2.50	-
전 기	특 급	7.97	12.87	증) 4.90
정보통신	중 급	5.86	5.86	-

<직접인건비 중 상주기술자 투입개월수 변경 현황(2차분)>

분 야	등 급	2 차 분 (단위 : 개월)			비 고
		당 초	변 경	증 ․ △감
책임건설사업관리기술자	고 급	17.00	25.00	증) 8.00
조 경	중 급	8.33	16.33	증) 8.00
조 경	초 급	-	-	-
토 목	중 급	17.00	25.00	증) 5.00
토 목	초 급	9.43	8.19	△ 1.24
건 축	중 급	8.43	8.43	-
기 계	중 급	-	-	-
전 기	특 급	3.97	8.87	증) 4.90
정보통신	중 급	2.63	2.63	-

- 경춘선 3단계 공사의 준공예정일(2018.06.30.)을 감안 준공검사, 인수인계, 백서제작 등 원활한 업무수행을 위한 건설사업관리용역 수행 기간 조정 필요

구 분	당 초	변 경	증 ․ △감	비 고
전 체	‘15.04.13.~‘17.12.31.	‘15.04.13.~‘18.08.31.	증) 243일
2차분	‘16.08.01.~‘17.12.31.	‘16.08.01.~‘18.08.31.	증) 243일

○ 기 타

- 현지사무원 및 차량운행비 추가

- 월간보고서 추가

- 용역비 증가에 따른 손해보험료 증액 등

○ 개략금액 변경 현황 (전체5회, 금회2차 3회)

구 분	당 초	변 경	증 ․ △감	비 고
전 체	1,492,040 천원	1,842,040 천원	증) 350,000천원
2차분	808,453 천원	1,158,453 천원	증) 350,000천원

Ⅲ

조치계획

○『경춘선 폐선부지 공원조성 건설사업관리용역(2,3단계)』 계약변경 요청건에 대하여 검토 결과, 타당한 것으로 판단되고 장기계속공사 성질상 중단할 수 없는 사업임에 따라 2018년 시작 전에 계약이 될 수 있도록 우선 계약변경 승인 조치코자하며, 추후 설계변경 시 반영하도록 건설사업관리기술단에 통보하고자 함.

※ 예산증가분은 푸른도시국에 예산재배정 요청

붙임  건설사업관리기술단 실정보고서(내역서 포함) 1부.  끝.