문서번호	도시철도토목부-16076
결재일자	2017.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	12/11 김진팔
협 조
	주무관			김근수
	주무관			조태현

『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)』

건축한계 측정에 따른 실정보고 검토

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)

건축한계 측정에 따른 실정보고 검토

서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 추진 중 3단계 구간에 구조물 구축, 시설물의 설치상태 적정성 및 차량운행 저해요인 제거를 위하여 건축한계 측정을 위한 신규공정(건축한계틀 정비 및 운영)에 따른 검토 보고임.

- 건축한계 검측계획 보고[도시철도토목부-14313(2017.11.06.)]

- 건축한계틀 정비 및 운영 실정 보고[도화(궤도)-213(2017.12.03.)]

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구)

❍ 위     치 : 서울특별시 송파구 잠실동 ~ 송파구 송파동

❍ 규     모 : 궤도부설 9.48km,  분기기부설 11틀

❍ 계약금액 : 6,516,008,700원

❍ 공사기간 : 2016.09.26. ~ 2017.12.25.

❍ 시 공 사 : ㈜한일철도 외 1개사

❍ 건설사업관리 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅱ		건설사업관리단 보고 내용

❍ 건축한계틀 정비

- 건축한계틀은 신공항철도에서 오랜기간 방치되어 정비 필요

❍ 건축한계틀 운영

- 건축한계틀 운영을 위한 철도차량(모터카) 운행 운전자 필요

❍ 건축한계틀

건축한계틀 정비전	건축한계틀 정비후

❍ 건축한계 운영(측정)

- 1차 측정 : 2017.11.14. ~ 11.18. 5일간(입환 포함)

- 2차 측정 : 2017.11.27. ~ 11.30. 4일간

❍ 공사비 검토

구 분	금 액(원)		증·감	비고
	당초	변경
직접공사비	0	11,045,357	증 11,045,357
제경비	0	3,398,270	증 3,398,270
합 계	0	14,443,627	증 14,443,627

Ⅲ		조치의견

❍ 상기 건설사업관리단의 보고 의견과 같이 건축한계 측정을 위한 건축한계틀 정비 및 운영이 필요하다 판단되며,

❍ 3단계 구간에 시설물의 설치상태 확인 및 차량운행 저해요인 제거를 위하여 상기와 같이 시공하고 설계변경 시 반영      (증14,444천원) 조치코자 함

붙임 : 실정보고 1부.  끝.