과 장		12/12 김권일	심사자	김동민		설계자	정회곤		설 계	심 사		결 재
									2017년 12월 일	2017년 12월 일
설 계 변 경 서(정산)
	공사명 : 2017년 노후포장도로 정비 노면표시공사(강서1구역)(정산)
	구 분				금 역 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 92,778,000원			금 77,341,000원			감 15,437,000원
	도급비	공 급 가 액			금 84,343,637원			금 70,310,000원			감 14,033,637원
		부 가 가 치 세			금 8,434,363원			금 7,031,000원			감 1,403,363원
		계			금 92,778,000원			금 77,341,000원			감 15,437,000원
공사개요 - 당 초 : 차선도색 41,460m, 도로표지병설치 300개 - 변 경 : 차선도색 34,891m, 도로표지병설치 0 개