투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(2차2회)시행-사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

1. 시설보수과-10660(2017.12.8.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)』에 대한 설계변경(2차2회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2018. 5. 30. (2차:‘17.8.1~‘18.5.30)

다. 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

라. 설계변경 내역                                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	3,524,600,000	3,661,900,000	증) 137,300,000
2 차	1,760,600,000	1,897,900,000	증) 137,300,000

마. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(▲137,300,000) - 기 재배정된 총사업비 내 집행잔액 예산 사용임.

바. 설계변경 사유

- 기존교량 바닥판 손상 추가 보수보강 반영(▲88,000,000)

- 기존교량 주형 및 가로보 콘크리트 보수 등 시공물량 증감 등 반영(▲49,300,000)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고 방침서 1부.

2. 감리단 설계변경 보고서 1부

3. 설계변경내역서(총차 및 2차) 1부.

4. 제비율검증 확인서(총차 및 2차) 각1부.

5. 합의각서 1부.  끝.

주무관							이동섭				주무관					김종성					시설보수과장					代김종성					서부도로사업소장						12/12 배광환
협조자				주무관							윤미란					관리단속과장							안근
시행			시설보수과-10762										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)