	서부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청

1. 여의도공원관리사무소-5450(2017.12.12.)호와 관련입니다.

2. 여의도공원산책로정비공사 추진관련 아래와 같이 관급자재 납품기한을 연장요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 연장내역

품 명	계약자	물품분류번 호 (물품식별 번 호)	규 격	단위	수량	납품요구번호	납품 기한		사 유
							당 초	변 경
흙콘크리트	㈜드림로드	30111595 (22074893432638)	t150mm 15mpa 습식	㎡	9,900	12-17-1-76452-00	’17.12.12.	’18.04.30.	폐기물처리용역2회유찰로 선 공정 지연 및 공사품질확보

붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

	여의도공원관리사무소장
주무관	김은희		시설팀장	고정곤		여의도공원관리사무소장	12/12 정일환
협조자
시행	여의도공원관리사무소-5455	(		)	접수		(		)
우	07243	서울특별시 영등포구 여의공원로 68 (여의도동2)	/
전화	02-761-4079	/전송	02-786-2599	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개