문서번호	교통운영과-23874
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
이민영		박동욱	12/12 代서인석
협 조
	주무관			이민호
	주무관			조혜진
	주무관			오인숙

준공기한 연기보고

(중앙정류소 시설개선 기본 및 실시설계)

2017.12

도시교통본부

(교통운영과)

준공기한 연기보고

중앙정류소 보행대기공간 및 시설개선을 위하여 시행하는 「중앙정류소 시설개선 기본 및 실시설계」와 관련하여 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고함.

□ 용역현황

가. 용 역 명 : 중앙정류소 시설개선 기본 및 실시설계

나. 계 약 일 : ***********

다. 착 공 일 : ***********

라. 준 공 일 : **********

마. 계약금액 : ************

바. 계 약 자 : *******************

□ 보고내용

가. 사업진행 현황

∘ 2017.06.30.   : 중앙 정류소 시설개선 기본 및 실시설계 계약

∘ 2017.06.30. ~ : 정류소 개선 대상지 설계 착수

나. *************************************************************************************

□ 조치계획

가. 준공기한내 용역완료가 불가함에 따라 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함.

나. 준공기한 변경

용역명	준공기간		증·감	비고
중앙정류소 시설개선 기본 및 실시설계	당초	*********************	****	****
	변경	*********************

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정자치부 ‘17.2.1]

제14장 용역계약일반조건 제7절-1-다 지연배상금 미부과사유)

라. 준공기한 변경의뢰 : 재무과

붙 임 : 합의각서, 준공기한 변경의뢰서 각 1부. 끝.