문서번호	도로보수과-13186
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	12/12 김용제
협조
	주무관		정회곤

2017년 노후포장도로정비공사(강서2구역) 설계변경 검토보고(정산)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도 로 보 수 과

2017년 노후포장도로정비공사(강서2구역)

설계변경 검토보고(정산)

우리사업소에서 시행중인 2017년 노후포장도로정비공사(강서2구역)와 관련하여 책임건설사업관리용역사로부터 설계변경(정산) 보고서가 접수되어 내용 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▶ 관련문서 : 제2회 설계변경 검토보고(2017년 노후도로정비공사(강서2구역)

책임건설사업관리용역사 ㈜한국종합기술 대표이사 이인제

Ⅰ		사업개요

❍ 공 사 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역)

- 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 t = 5㎝~10㎝, A = 875a

- 공사기간 : 2017. 4. 3 ~ 12.15

- 도 급 비 : 703,901,000원

- 도 급 자 : 승백건설 주식회사 대표 이기수

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후

포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 용 역 명 : 2017년 노후포장도로정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및

처리용역

- 용역개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 22,500톤

- 용역기간 : 2017. 6. 5 ~ 12.15

- 도 급 비 : 228,030,000원

- 도 급 자

·운반업체 : ㈜삼양이앤디 대표 최훈성

·처리업체 : ㈜드림아스콘 대표 박광동,서정윤 , ㈜검단아스콘 대표 곽순자

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후

포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅱ		설계변경 내용

❍ 변경사유

- 관련근거

·도로보수과-11136(2017.10.20.) 노후포장도로 정비예산 집행계획 보고

·도로보수과-11809(2017.11.07) 노후포장도로 정비예산 집행계획 보고

- 추가공사에 따른 노후포장도로 정비공사의 수량 및 공사비 증·감 발생

❍ 수량 증감 대비표

-  노후포장도로 정비공사

공 종 명	규 격	단위	당초물량	변경물량	증·감	비고
절삭후 아스팔트 덧씌우기	t=5㎝, 야간, 개질(6차로)	a	25	24.78	감)0.22
	t=5㎝, 야간, 일반(6차로)	a	20	156.79	증)136.79
	t=5㎝, 야간, 일반(4차로)	a	0	15.01	증)15.01
	t=10㎝, 야간, 개질(6차로)	a	300	219.70	감)80.3
	t=10㎝, 야간, 일반(6차로)	a	430	426.24	감)3.76
	t=10㎝, 야간, 일반(4차로)	a	0	228.50	증)228.50
	작업능력저하구간, t=5㎝,야간,일반(6차로)	a	100	176.12	증)76.12
	작업능력저하구간, t=5㎝,야간,일반(4차로)	a	0	95.46	증)95.46
택코팅	RSC-4, 야간	a	1,605	2,217.04	증)612.04
야간공사 조명비	절삭 덧씌우기 /50a 기준	a	45	196.58	증)151.58
	절삭 덧씌우기 /30a 기준	a	730	874.44	증)144.44
	절삭 덧씌우기 /25a 기준	a	100	176.12	증)76.12
포장장비 운반비	10㎞ 이내, 연속구간	회	11	14	증)3

- 관급자재

공 종 명	규 격	단위	당초물량	변경물량	증·감	비고
관급자재	일반, WC-3, 1등급, t=20㎜, PG64-22	ton	7,000	12,338	증)5,338
	개질, WC-3, 1등급, t=20㎜, PG76-22	ton	3,616	3,746	증)130
	순환아스팔트 콘크리트	ton	9,500	10,477	증)977
	미끄럼방지포장	㎡	257	930	증)673

- 폐기물처리용역

공 종 명	규 격	단위	당초물량	변경물량	증·감	비고
폐기물운반	현장(야간)-왕복, 드림아스콘	ton	16,500	17,012	증)512
	현장(야간)-왕복, 검단아스콘	ton	6,000	9,081	증)3,081

Ⅲ		사업비 증·감 현황

구 분		금 액			비고
		변경전	변경후	증감액
총공사비		2,381,131,000	3,112,392,710	증 731,261,710
도급액	공급가액	639,910,000	889,490,000	증 249,580,000
	부가가치세	63,991,000	88,949,000	증 24,958,000
	계	703,901,000	978,439,000	증 274,538,000
관 급 비		1,449,200,000	1,862,220,710	증 413,020,710
폐기물처리용역		228,030,000	271,733,000	증 43,703,000

※ 노면표시(차선) 도색, 무인교통단속장비 검지선복구공사 제외

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 추가물량 발생 및 물량 증감사항에 대하여 설계변경 정산처리하고자 함.

붙 임   1. 설계변경내역서 2부.

2. 제비율검증서 1부.

3. 제2회 설계변경 검토보고(감리) 1부.

4. 관급자재 수불부 1부. 끝.