	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치사업 개통시기 변경 통보

1. 도시기반시설본부 토목부-25003(2017.11.29.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 추진중인 천호대로 연장 중앙버스전용차로 설치공사는 금년 12월 개통예정이었으나 자재수급 지연 및 보도공사 Closing11으로 인해 개통일정이 변경되었음을 알려드리니 사업개선명령 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 사업구간 : 천호대로 연장(아차산역사거리~천호대교 남단, 2.6km)

나. 사업규모 : 중앙정류소 5개소(도심방향 2개소, 외곽방향 3개소)

다. 대상노선 : 5개 노선

라. 개통일정 : 2017.12.20.(예정) -> 2018.4월(개통날짜 확정시 추후 통보). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	버스정책과장,경기도지사(버스정책과장)
주무관	오인숙		BRT팀장	박동욱		교통운영과장	12/12 代서인석
협조자	주무관	이민영
시행	교통운영과-23886	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 서소문청사 1동 6층	/
전화	2133-2473	/전송	2133-1053	/	ois033@seoul.go.kr	/	대시민공개