문서번호	주거환경개선과-14002
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

		시 민
주무관	주거환경행정팀장	주거환경개선과장
정윤진	양성태	12/12 유철호

은평구 신사동(편백마을) 주거환경관리사업

토지 및 건물 매입 변경 추진계획

2017. 12.

도시재생본부

(주거환경개선과)

은평구 신사동(편백마을) 주거환경관리사업

토지 및 건물 매입 변경 추진계획

은평구 신사동(편백마을) 주거환경관리사업과 관련하여 공동이용시설로 활용

하기 위해 매입을 추진중인 대상지의 매도자 요구 및 예산의 효율적 운영을 위한 계획 변경 추진보고임

**********************************************************

1		사 업 개 요

□ 대상지 현황

○ 위    치 : *****************

○ 대지면적 : ***

○ 건물면적 : **************************************************

○ 현    황 : ******************************

□ 추진개요

○ `16.05.16 : 주거환경관리사업 대상지 확정

○ `16.10.17 : 정비계획 용역착수************************

○ `17.09.08 : 제8차 주거환경관리자문단 현장자문 (안건 : 공동이용시설 부지매입)

○ `17.09.14 : 제11차 주거환경관리자문단 자문*********************

○ `17.10.17 : 감정평가 결과 회보 및 소유주 협의******************

○ `17.10.24 : 매매계약 및 계약금 지급

○ `17.12.04 : 매입 추진계획 변경************

○ `17.12.11 : 잔금일자 변경 요청

2		변 경 추 진(안)

(단위 : 원)

연번	구 분	당 초	변경(안)	비 고
1	중도금지급	0	267,000	기변경
2	잔금 지급액	315,000	48,000	기변경
3	중도금 지급일자	`17.12.22.	합의하에 앞당길 수 있음	특약사항
4	잔금 지급일자	`18.02.22.	`18.03.15

○ 매도자 개인사정에 의한 잔금일자 변경 요청을 반영하고, 예산의 효율적 활용을

위하여 합의하에 중도금 및 잔금일자를 앞당겨 집행가능한 특약사항 추가하여

추진코자 함

3		향 후 계 획

*****************************

*******************************

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.