	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	설계변경 자문소위원회 결과 통보

1. 도시철도토목부-15603호(2017.12.01.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행 중인『서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구 및 2공구)』의 설계변경 자문소위원회 결과를 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 자문결과

구 분	자 문 의 견	비 고
1공구	▷ 원안가결 - 분기기 설치구간 사급자재 산출 오류
	▷ 원안가결 - EGI 안전휀스 설치 제외
	▷ 원안가결 - 분기기 철관장치 및 무도유 상판 설치
2공구	▷ 원안가결 - 분기기 설치구간 사급자재 산출 오류
	▷ 원안가결 - EGI 안전휀스 설치 제외

붙임 : 설계변경 자문소위원회 결과 보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(1공구) 책임건설사업관리기술자,서울지하철 9호선 3단계 궤도공사(2공구) 책임건설사업관리기술자
주무관	최경호		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	12/12 김진팔
협조자	주무관	조태현		주무관	김근수
시행	도시철도토목부-16160	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스 9층	/
전화	772-7243	/전송	772-7306	/	ckh4815@seoul.go.kr	/	대시민공개