문서번호	도시철도설비부-14923
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
이재복		김영수	12/12 구자훈
협 조
	주무관			이재영

「서울지하철 9호선 3단계 1, 2구간 송변전공사」

설계변경 자문(소)위원회 개최 결과 보고

2017. 12

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 1, 2구간 송변전공사

설계변경 자문(소)위원회 개최 결과 보고

서울지하철 9호선연장건설 3단계 1구간 및 2구간 송변전공사 설계변경 자문위원회(소위원회)를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		공사개요

▢ 서울지하철 9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전 공사

○ 공사기간: `15. 8.20.~`18. 2. 4 (2차: ‘16.12. 1.~`18. 1.11.)

○ 계약금액: 총 5,885,611,900원 (2차: 4,885,611,900원)

○ 계 약 자: 거성일렉콤(주), 동일전력토건(주)

○ 공사규모: 변전소(931,935) 2개소, 수전선로 10Km, 연락송배전선로 75Km

▢ 서울지하철 9호선연장건설(3단계) 2구간 송변전 공사

○ 공사기간: `15. 9. 2.~`18. 2.17. (2차; ‘16. 9. 1~`17.12.31)

○ 계약금액: 총 4,703,036,098원 (2차: 3,232,736,098원)

○ 계 약 자: (주)삼진일렉스

○ 공사규모: 변전소(938)1개소, 수전선로 11Km, 연락송배전선로 40Km

Ⅱ		자문회의 개요

▢ 일    시: 2017.12. 8(금) 14:00~18:00

▢ 장    소: 도시철도설비부 회의실

▢ 심의내용: 설계변경 적정성 여부 심사

▢ 위원회 구성: 위원장 1(송변전과장), 외부위원 3, 내부위원 3

▢ 심의안건: 발주처 지시 및 현장여건에 따른 변경사항

○ 송변전공사 1구간 : ① 변전소 수전선로 변경 ② 변전소 자동소화장치 신설 ③ 변전소

전력간설 설비 변경 ④ 제어케이블 신설 등

○ 송변전공사 2구간 : ① 수전선로: 한전임대관로 사용(수전선로 굴착구간 감소), 도로                            굴착구간 야간 작업 등 ② 송.배전설비: 공사구간 시.종점 및                             938S1환기실 위치 변경 등 ③ 변전설비: 기기간 제어케이블 누락,                            변전실 바닥 치핑 및 콘크리트 타설 등

Ⅱ		자문회의 결과

▢ ************

구분	위원명	심의위원 검토의견	비고
외부위원	강희관	신규비목 설계반영시 견적서 2개 이상 비교산출 필요 신규 단가산정은 낙찰률 적용 검토 931, 935변전소 에폭시 부분 콘크리트 치핑 물량 재확인 적용
	이재석	가격조사정보지에 없는 품목(전력구 천공구조검토, 압입공법시공 등)은 전문업체 견적을 2개소 이상 비교하여 낮은가격으로 적용 요함 단가조사내용과 내역서에 반영된 단가가 일부차이가 있으니 수정요함 (고체에어졸, 케이블덕트 등)
	장영종	설계변경보고서와 내역변경의 수량이 상이하므로 확인후 수정요함 에폭시 바닥 치핑면적 산정은 DC차단기반 면적은 제외 시킬것
내부위원	김동일	협의단가 적용시 2개업체이상 견적이 필요함 조사단가와 내역서상의 단가 적용 일치 필요
	황영필	단가조사는 2개업체이상 조사할 것 에폭시 바닥 치핑물량 재산출 요함
	문학준	신규비목 단가적용시 2개사 이상 조사후 적용 해야함 에폭시 콘크리트 깨기물량 재산정 요함

▢ ************

구분	위원명	심의위원 검토의견	비고
외부위원	강희관	도로임대비용 ⇒도로점용료 표기(항목표기) 가격산출 신규단가 산정은 낙찰률 적용 검토 개통시기를 고려 준공기한 연기 검토 요함
	이재석	변전설비공사의 단가조사 내용과 내역서에 반영한 단가를 일치하도록 수정요함 수전선로 공사시 주간공사를 야간공사로 전환한 공정에 대한 야간 일위대가를 별도작성하여 반영요함
	장영종	변전설비공사 단가조사표와 적용단가가 상이하므로 동일하게 적용바람 변전소 자동확산 소화기설치 단위는 Set 단가로 적용 요함
내부위원	김동일	신규단가 적용시 2개업체이상 견적이 필요함 조사단가와 내역서상 단가 적용 일치가 필요
	황영필	단가조사는 2개업체이상 조사할 것
	문학준	주간 ⇒ 야간 변경에 따른 일위대가를 신규로 작성 적용할것 신규비목 적용시 적용기준 통일할 것

Ⅱ		향후계획

▢ 자문회의결과 보완 후 설계변경 추진

○ 자문위원 검토의견서를 감리단에 통보하여 보완 후 설계변경 시행

○ 준공기한 연장검토(개통시까지 지속적 설비 보완 필요)

- `15.9.2~`18.2.17.(2차; ‘16.9.1~`17.12.31) → ’18.12.30(총차 및 2차)

▢ 외부자문위원 자문비 지급 : 450,000원

○ 150,000☓ 3명(기본100,000원, 2시간 초과 50,000원)

따로붙임 1. 참석자 명단 1부

2. 자문회의결과 1구간 및 2구간 각 1부

3. 자문위원 검토의견서 1구간 및 2구간 각 1부.  끝.