문서번호	여의도공원관리사무소-5451
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장		서부공원녹지사업소장
박현주	송규환	정일환		12/12 김종근
협 조

- 선유도 무장애 친화공원 조성공사 -

실정보고 승인요청 사항 검토보고

2017. 12.

여의도공원관리사무소

(선유도공원)

- 선유도 무장애 친화공원 조성공사 -

실정보고 승인요청 사항 검토보고

『선유도 무장애 친화공원 조성공사』중 공사감독업무를 수행중인 서울시 시설관리공단으로부터『공사현장 실정사항 승인』요청건이  있어 아래와 같이 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 선유도 무장애 친화공원 조성사업

❍ 공사기간 : 2017. 11. 2. ~ 2017. 12. 31.

❍ 주요시설 : 장애인 주차라인 정비, 트렌치덮개교체, 안내판 정비, 데크시설 정비, 무석면패널 설치, 화장실 시설개선 등

❍ 도 급 액 : 금236,669,600원

❍ 도 급 자 : 고양종합건설㈜ 대표 이홍준

❍ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독3처

Ⅱ		승 인 요 청 내 용

□ 실정보고 내용

- 발주처 지시사항

구분	검토요청 사항	검토결과	비고
안내시설	▸ 공원입구 2개소 자전거 진입금지 및 진입 유도 신규 표시 추가 반영 ▸ 현황과 맞지 않는 공원입구 기존차량 진입표시 삭제	▸ 라인마킹 추가 - 라인마킹 : 21.9㎡ → 39.62㎡ ▸라인마킹 기호 제거 - 라인마킹기호제거 : 1.2㎡ → 3.62㎡	승인
데크공사	▸ 시간의 정원 데크 경사턱 낮춤 1개소 추가 반영	▸경사데크 추가 - 경사데크E(T25×W1800×L2600):0개소→1개소	승인
시설물	▸ 공원미관을 고려한 출입차단시설(장애인주차장앞, 카페나루 옆 선착장 입구) 추가 반영	▸ 출입차단시설 추가 - 출입차단시설A(H1200×L12700):0개소→1개소 - 출입차단시설B(H1200×L6700):0개소→1개소	승인

- 서울시설공단 현장 실정 검토사항 : 제20171211호(2017.12.11.)

구분	현황 및 문제점	검토결과	비고
데크공사	▸ 데크 장선 간격이 넓어(1.5m) 이용객 안전 우려 ▸ 데크 A,B,C,D 기존 높이와 계획고상이 ▸ 데크 A,B 설치시 기둥위에 설치하도록 되어 있으나 실제로 기둥이 없거나 노후되어 설치 곤란 ▸ 경사데크 A,B,C,D 하부철물에 녹막이 페인트 누락	▸장선간격을 0.5m로 조정하고 기존 데크와 연결을 고려하여 멍에 높이 조정 및 녹막이 페인트 반영하고 현황에 맞게 기둥 설치 - 데크A: 1식 → 0식 - 데크A-1(장선추가,기둥신규,멍에): 0식 → 1식 - 데크B: 0식 → 1식 - 데크B-1(장선추가,기둥신규,멍에): 0식 → 1식 - 데크C: 0식 → 1식 - 데크C-1(장선추가,기둥신규,멍에): 0식 → 1식 - 데크D: 0식 → 1식 - 데크D-1(장선간격,기둥신규,멍에): 0식 → 1식 - 경사데크A: 0식 → 1식 - 경사데크A-1(장선추가,녹막이): 0식→1식 - 경사데크B: 0식 → 1식 - 경사데크B-1(장선추가,녹막이): 0식→1식 - 경사데크C: 0식 → 1식 - 경사데크C-1(장선추가,녹막이): 0식→1식 - 경사데크C: 0식 → 1식 - 경사데크C-1(장선추가,녹막이): 0식→1식 - 경사데크D: 0식 → 1식 - 경사데크D-1(장선추가,녹막이): 0식→1식	승인
포장공사	▸ 무석면시멘트패널 교체 구간의 하부가 노후 되어 시공 곤란 ▸ 이야기관 지상1층, 지하1층에 일부공간만 방수가 반영되어 누수 발생이 우려됨.	▸ 노후된 콘크리트 바닥 철거 및 폐기물 상차 - 콘크리트바닥깨기(T80):0.5㎡→471.52.8㎡ - 콘크리트바닥깨기-1(T220):0㎡→72.97㎡ - 콘크리트바닥깨기-2(T30):0㎡→192.2㎡ - 폐기물상차:0㎥→60.82㎥(139.886ton) ※ 폐콘크리트 물량이 139.886ton으로 분리발주 필요(폐기물 산출내역 첨부) ▸ 이야기관(지상1층, 지하1층)방수를 시행하고, 바닥을 철거한 구간은 습식공법으로 변경 - 무석면시멘트판넬포장(실외A):256.4㎡→0㎡ - 무석면시멘트판넬포장(실외A)-1:0㎡→189.2㎡ - 무석면시멘트판넬포장(실외B):147.8㎡→118㎡ - 무석면시멘트판넬포장(실외B)-1:0㎡→139.7㎡ - 무석면시멘트판넬포장(실내):306.3㎡→0㎡ - 무석면시멘트판넬포장(실내)-1:0㎡→263.6㎡ - 계단(W4500, 22단):1식→0식 - 계단-1(W4500, 22단):0식→1식	승인
	▸ 이야기관 경사로 계획고와 현장실측 상이로 단차 발생	▸ 경사로 시작부분 소형고압블럭 일부 철거 후 기존 포장 높이로 마감 처리 - 경사로(W2,350,73.2㎡):1식→0식 - 경사로-1(W2,350,80.89㎡):0식→1식	승인

※ 상기내용 중 시공 시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경  사항은 설계변경시 반영

※ 기타사항

❍ 기타 보험료 등 미사용 제경비 설계변경시 정산 반영

❍ 석면시멘트패널 철거에 따른 폐기물(폐콘크리트) 분리발주

- 수    량 : 폐콘크리트 139.886ton

- 소 요 액 : 4,516천원

Ⅲ		변경금액(개략공사비)

구 분		금액(천원)			비고
		당초	변경	증감
총 계		236,669천원	298,029천원	61,360천원
도급비	계	236,669천원	293,513천원	56,844천원
	공급가액	215,154천원	266,830천원	51,676천원
	부 가 세	21,515천원	26,683천원	5,168천원
폐기물처리	계	-	4,516천원	4,516천원
	공급가액	-	4,105천원	4,105천원
	부 가 세	-	411천원	411천원

※ 개략공사비 세부내역 : 따로붙임

Ⅳ		검 토 의 견

□ 서울시 시설관리공단 실정보고 사항에 대하여 상기와 같이 승인 처리하여 공사를 우선 시행하고 설계변경 반영 추진

□ 상기 내용을 토대로 낙찰차액(36,745천원)을 활용코자하며 부족액(25,000천원)은 재배정 추가 요청(공원녹지정책과)

붙 임 : 관련공문 각 1부.  끝.