문서번호	도로보수과-13126
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	12/12 김용제
협조
	주무관		천석기

2017년 자전거도로 유지보수 1,2단계 사업(시설물)

작업완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

강서도로사업소

[도로보수과]

자전거도로 유지보수 1,2단계 사업(시설물) 작업완료 보고

□ 관련근거

○ 2017년 자전거도로 유지보수 1단계 사업 시행계획 보고

【도로보수과-7254호(17.07.12.)】

○ 2017년 자전거도로 유지보수 2단계 사업 시행계획 보고

【도로보수과-11916호(17.11.10.)】

○ 2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 5차 작업지시

【도로보수과-11158호(17.10.23.)】

□ 사업개요

□ 자전거도로 유지보수 1단계 사업

○ 사업내용 : 미끄럼방지포장 설치 217㎡, 자전거마크 설치 12개

○ 위    치 : 영등포구 남부교육청앞 교차로

○ 사 업 비 : 8,217천원

○ 예산과목 : 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충

및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 자전거도로 유지보수 2단계 사업

○ 사업내용 : 미끄럼방지포장 설치 166㎡, 자전거마크 설치 24개, 종방향그루빙 시공 330㎡, 절삭 후 덧씌우기 1.66a

○ 위    치 : 구로구 거리공원 오거리 외 4개소

○ 사 업 비 : 19,998천원

○ 예산과목 : 교통사업특별회계, 자전거정책과, 자전거이용시설 확충 및

관리, 자전거도로 유지보수, 시설비(401-01)

□ 작업완료 보고(정산)

□ 자전거도로 유지보수 1단계 사업

○ 작업 내역 및 예산 소요액

(단위 : 천원)

공종	물량		증·감	소요예산(천원)		증·감
	당초	변경		당초	변경
자전거마크설치	12개	12개	-	1,024	1,024	-
미끄럼방지 포장	217㎡	217㎡	-	7,192	7,636	증)	444
합 계				8,216	8,660	증)	444

○ 보고내용

- 실시설계 내역 상 물량과 현장작업 물량 차이 발생(실시설계 과다 설계)

- 실시설계 내역 상 단가와 실제 발주 단가의 차이로 인하여 소요예산이 경미하게 증액

□ 자전거도로 유지보수 2단계 사업

○ 작업 내역 및 예산 소요액

(단위 : 천원)

공종	물량		증·감	소요예산(천원)		증·감
	당초	변경		당초	변경
자전거마크설치	25개	24개	감) 1개	1,205	1,156	감)	49
미끄럼방지 포장	166㎡	166㎡	-	5,507	5,758	증)	251
종방향그루빙	330㎡	330㎡	-	7,287	8,650	증)	1,363
절삭 후 덧 씌우기	1.66a	0a	감) 1.66a	5,307	0	감)	5,307
합 계				19,306	15,564	감)	3,742

○ 보고내용

- 절삭 후 덧씌우기 구간의 포장면 상태가 양호하여 예산절감 차원에서 재포장하지 않고 기존 포장면에 미끄럼방지 포장

※포장면 현황 : 2015년 포장, SPI 6.83

- 실시설계 내역 상 물량과 현장작업 물량 차이 발생(실시설계 과다 설계)

- 실시설계 내역 상 단가와 실제 발주 단가의 차이로 인하여 소요예산이 경미하게 증액

- 현장 여건 상 야간작업이 불가피하여 소요예산이 경미하게 증액

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 같이 현장여건 변화 및 물량조정 등을 포함하여 적합하게 완료하였기에 2017년 도로 및 교통안전부속시설물 유지보수공사 최종설계 변경 시 정산(도급비, 관급비)처리하고자 함.

붙 임  1. 작업 완료 내역서 각 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.