문서번호	급수운영과-32993
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김왕근		권기섭	12/12 송근호
협조

『 뚝섬역 원인자부담 이설공사(상수도 및 소화전) 』

준공승인 요청에 대한  검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

『 뚝섬역 원인자부담 이설공사(상수도 및 소화전) 』

준공승인 요청에 대한 검토보고

뚝섬역 원인자부담 이설공사(상수도 및 소화전) 완료에 따른 준공승인 요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울교통공사 토목1사업소-8998(2017. 11. 29.)

【뚝섬역 원인자부담 이설공사(상수도 및 소화전) 완료에 따른 준공승인 요청】

서울교통공사 토목1사업소-8998(2017. 12. 05.)

【뚝섬역 원인자부담 이설공사(상수도 및 소화전) 완료에 따른 추가자료 제출】

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명: 지하철 승강편의시설 설치공사(1단계)20공구 중 저촉 상수도관 이설공사

원 인 자: 서울교통공사

위    치: 성동구 성수동1가 8-6번지 일대

공사개요: 상수도관 D=400mm, L=40m 및 소화전 이설

시 공 사: ***************
공사기간: 2017. 9. 21.~2017. 11. 30.

Ⅲ		검 토 내 용

목 차	검토사항	검토의견
공사용 자재	사급자재 승인요청에 의한 검토	승인
원인자 부담금	원인자 부담금 납부 확인	완료
착 공	착공계 제출 후 공사 시행	승인
시 공	이설승인 조건에 따른 시공내역 확인	완료
단 수	단수계획 일정 수도사업소와 협의	완료
준 공	준공계 제출에 따른 검토	완료
GIS 속성자료	GIS 속성자료 제출	완료

Ⅳ		조 치 의 견

상기와 같이 상수도관 이설에 따른 승인 조건을 이행하였기에 승인코자 함.
행정사항: 서울교통공사에 통보.  끝.