“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	교통정책과-22915		주무관	신교통추진팀장		교통정책과장		안전교통국장
			백승만	이성노		신동명		전결 12/12 박은섭
등록일자	2017.12.8.
결재일자	2017.12.12.
공개구분	부분공개
			협조자
					재무과장		정한호
					계약팀장		박성희

- 주택가 주차난 해소와 쾌적한 주거환경 조성을 위한 -

2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경(최종)

o 설계변경사유 : 현장여건 및 완료내역 현장점검에 따른 시공물량 증·감 반영

- 주요변경사항

공 종	규 격	단위	당초	변경	증․감	비고
콘크리트 블록포장	T=8㎝	a	10	10.09	증) 0.09
도로경계블록설치	150*150*1000	m	350	342.36	감) 7.64
수목제거	R20 이상	주	26	30	증) 4

o 공사비 증감 내역                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	287,273,400	286,359,000	감) 914,400
도급비	228,496,600	232,660,000	증) 4,163,400
관급비	35,811,000	31,567,000	감) 4,244,000
이전비(폐기물처리용역비)	22,965,800	22,132,000	감) 833,800

o 조치계획

- 현장여건에 따른 시공물량 변경사항 반영코자 설계변경(정산) 추진

2017.  12.  .

	강 남 구
(		교통정책과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조 • 동법 시행령 제74조 제1항 • 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (안전행정부예규 제74호 2014) 제13장 공사계약일반조건 7-1 설계변경으로인한 계약금액의 조정 • 건설공사설계 설계변경 가이드라인(2014 서울시)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 추진경위 : 공사량의 증감에 따른 계약금액 조정
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 근거 : 2017 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준, 예산배정 • 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구민전체
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 근거 및 기준을 검토한 결과 적정함
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가) 설계변경(최종)

우리구에서 시행중인「녹색주차마을 조성사업(연간단가)」의 공사가 완료되어 현장여건에 따른 물량 증․감을 반영코자 설계변경(정산) 시행 후 준공코자 함.

1		공 사 개 요

o 사 업 명 : 2017년 녹색주차마을 조성사업(연간단가)

o 사업내용 : 주차장 25가구 50면 조성

o 사업기간 : 2017. 3. 16 ~ 12. 31.

o 예 산 액 : 326,000,000원[구비:299,000천원, 시비: 27,000천원(간주처리)]

o 도 급 비 : 228,496천원(관급자재비:35,811천원, 폐기물처리용역: 22,965천원)

o 도 급 자 : 범효건설 대표 오치식

2		공 사 완 료 현 황

o 추진목표 : 주차장 25가구 50면

o 추진완료 : 주차장 18가구 62면

연번	소재지		소유자	조성면수	구분	비고
	행정동	번지
1	개포4동	1235-6	손정민외1	2	다가구	1차작업지시
2	일원1동	629-9	홍선옥	2	다가구	2차작업지시
3	역삼2동	775-20	하상림	1	다가구
4	역삼1동	608-17	권인옥	6	단독	3차작업지시
5	일원1동	657-9	박기형외1	2	다가구
6	청담동	13-37	정재욱	4	단독	4차작업지시
7	논현동	47-15	양동진	1	다가구및근생
8	일원1동	632-5	김정아	2	단독	5차작업지시
9	청담동	123-2	백경자	2	단독	6차작업지시
10	자곡동	440-7	김정화	5	단독	7차작업지시
11	논현동	182-12	장범진	1	단독
12	대치동	979-7	최준환외3인	10	다세대	8차작업지시
13	역삼동	674-4	김지은외8	12	다세대	9차작업지시
14	청담동	58-4	맹지수외3	3	다세대	10차작업지시
15	율현동	196-79	임수산	3	단독	11차작업지시
16	대치동	971-20	이귀남	1	단독
17	논현동	77-9	황용희	4	단독	12차작업지시
18	자곡동	475-13	최장흠	1	단독
총 계	18가구			62면

3		보 고 내 용

o 설계변경 사유

- 공사완료내역 현장점검에 따른 물량 증·감 반영

※ 교통정책과-22681(2017.12.08.)

- 현장여건에 따른 공종별 주요 물량 증·감 반영(터파기 외 49개 공종)

- 주요 물량증·감 내역

공 종	규 격	단위	당초	변경	증․감	비고
콘크리트 블럭포장	T=8㎝	a	10	10.09	증0.09
목책대문설치	20톤 미만	개	17	16	감1
수도관이설	D=25mm	m	10	14	증4
도로경계블록설치	150*150*1000	m	350	342.36	감7.64
수목제거	R20 이상	주	26	30	증4
폐콘크리트처리		톤	713	617	감96
건설폐기물처리(혼합)	소각5% 이하	톤	32	68.35	증36.35

- 관급자재 : 금년 잉여자재는 내년 이월조치(콘크리트경계석)

※ 붙임의 관급자재정산내역 참조

o 공사비 증·감 내역

구 분		당 초	변 경	증 ▪ 감	비고
총공사비		287,273,400	286,359,000	감 914,400
도급비	공급가액	207,724,182	211,509,091	증 3,784,909
	부가가치세	20,772,418	21,150,909	증 378,491
	소계	228,496,600	232,660,000	증 4,163,400
관 급 비		35,811,000	31,567,000	감 4,244,000
이전비 (폐기물처리용역비)		22,965,800	22,132,000	감 833,800

(단위:원)

o 예산과목 : 교통정책과, 선진교통체계확충 및 정비, 강남교통비젼21

체계구축 및 주차편익시설건설(주차장특별회계),

녹색주차마을조성사업, 시설비및부대비, 시설비

4		조치 계획

o 상기 보고내용과 같이 현장여건에 따른 물량 증․감 반영을 위해 설계변경(정산) 시행 후 공사준공코자 함.

첨부 : 1. 설계변경내역서 각 1부.

2. 제비율검증 1부.

3. 관급자재정산내역 1부.  끝.