투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(봉제박물관 건립 기계설비공사)

우리 본부에서 시행 중인 『봉제박물관 건립 기계설비공사』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 봉제박물관 건립 기계설비공사

나. 계 약 자 : ㈜중원이엔지 대표 심성섭

다. 변경사유 : 선행공정 연장에 따른 준공기한 연기, 설계변경에 따른 계약금액 조정

라. 변경내용

구 분	당 초	변 경	증 감
계약기간	′16.12.07.~′17.12.14.	′16.12.07.~′18.01.23.	증40일
계약금액	99,141,350원	106,482,000원	증7,340,650원

붙임 : 1) 검토보고서 1부

2) 변경내역서 2부

3) 변경합의서 1부

4) 계약금액조정 검증확인서 1부 끝.

	설비부장
주무관	양우창		녹색성장과장	오삼록		설비부장	12/12 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-21144	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8620	/전송	02-3708-8659	/	yang7931@seoul.go.kr	/	대시민공개