문서번호	교통운영과-23875
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
이민영		박동욱	12/12 代서인석
협 조
	주무관			이민호
	주무관			조혜진
	주무관			오인숙

준공기한 연기보고

(2017년 중앙버스전용차로 흐름개선 용역)

2017.12

도시교통본부

(교통운영과)

준공기한 연기보고

시민이용 불편지점 해소를 위하여 시행하는 「2017년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역」과 관련하여 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고함.

□ 용역현황

가. 용 역 명 : 2017년 중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역

나. 계 약 일 : ***********

다. 착 공 일 : ***********

라. 준 공 일 : **********

마. 계약금액 : *************

바. 계 약 자 : *************

□ 보고내용

가. 사업진행 현황

∘ 2017.03.27.   : 중앙버스전용차로 흐름개선 설계용역 계약

∘ 2017.03.28. ~ : 흐름개선 대상지 설계 착수

나. ***************************************************************************************************

□ 조치계획

가. 준공기한내 용역완료가 불가함에 따라 준공기한을 연기하여 용역시행에 만전을 기하고자 함.

나. 준공기한 변경

용역명	준공기간		증·감	비고
2017년 중앙버스 전용차로 흐름개선 설계용역	당초	*********************	****	****
	변경	*********************

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정자치부 ‘17.2.1]

제14장 용역계약일반조건 제7절-1-다 지연배상금 미부과사유)

라. 준공기한 변경의뢰 : 재무과

붙 임 : 합의각서, 준공기한 변경의뢰서 각 1부. 끝.