서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계 용역)

1. 교통운영과-23872(2017.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진하고 있는 「2017년 교통사고 잦은곳 개선 사업 실시설계 용역」과 관련하여 다음과 같이 준공기한을 연기하고자 하오니 처리하여 주기시 바랍니다.

아        래 -

용역명	2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역
사업개요	삼양입구등 17개 지점
계약일	2017.08.03.
착공일	2017.08.03.
당초 준공기한	2017.12.31.
변경 준공기한	2018.03.31
***	******************
****	************
연기사유	용역 계획안에 대해 관련절차 이행중 관계기관 협의등으로 준공기한 연기
귀책소재	서울특별시
지체상금	미부과

붙 임   1. 용역 변경 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	교통운영과장
주무관	차양호		교통안전팀장	代기훈		교통운영과장	12/12 代서인석
협조자
시행	교통운영과-23883	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2446	/전송		/		/	부분공개(6)