문서번호	교통운영과-23872
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
차양호		代기훈	12/12 代서인석
협조
	주무관		김욱경

준공기한 연기보고

(`17 교통사고 잦은곳 실시설계용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시교통본부

교통운영과

준공기한 연기 보고

2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계 용역 시행중 관계기관  협의 및 교통안전시설 심의등에 따른 준공기한 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 현황

용역명	2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역
사업개요	삼양입구 사거리 등 17개 지점
계약일	2017.08.03.
착공일	2017.08.03.
준공기한	2017.12.31.
***	******************
****	************
***	***

□ 보고 내용

가. 사업진행(예정) 현황

ｏ 2017.08.  : 용역 착수

ｏ 2017.10.  : 현장 조사 및 분석

ｏ 2017.11.  : 설계안 작성 및 유관기관 협의

ｏ 2018.03.  : 설계안 경찰청 규제심의 협의(관할 경찰서 재협의 건의)

나. 연기 사유

ｏ 용역 계획안에 대해 심의 진행중 서울지방경찰청으로부터 관할 경찰서등 의견 수렴 요청등으로 준공기한 내 완료가 어려운 실정임

□ 조치 계획

가. 상기와 같이 준공기한 내 용역이 불가함에 따라 준공기한을 연기하여 용역 시행에 만전을 기하고자 합니다.

나. 준공기한 변경

용역명	준 공 기 간		증․감	비 고
2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 실시설계용역	당초	2017.8.3 ∼ 2017.12.31	증 90일
	변경	2017.8.3. ~ 2018.3.31

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

(관련근거 : 지방자치단체 용역계약일반조건 Ⅶ-1-다의 지체상금 미부과사유)

라. 준공기한 변경의뢰 : 재무과

붙임 1. 합의각서 1부

2. 용역 계약서 및 준공기한 변경의뢰서 각 1부.  끝.