문서번호	도시철도토목부-16157
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	12/12 김진팔
협 조
	주무관			김근수
	주무관			조태현

『하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구) 1차』

예비준공검사 결과 보고

2017. 12

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구) 1차』

예비준공검사 결과 보고

“하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구) 1차” 에 대한 준공 기한내 공사 완공 가능여부 및 미진사항의 사전 보완을 위하여 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1		공사 개요

○ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 궤도공사(1공구)

○ 구    간 : 서울시 강동구 상일동 ~ 경기도 하남시 덕풍동

○ 규    모 : 궤도부설 11.857km(단선, 콘크리트도상), 분기기 부설 13틀

○ 공사기간 : 2017.09.01. ~ 2018.12.31.

○ 계 약 액 : 5,799,448,000원(1차 : 400,000,000원)

○ 계 약 자 : 천운궤도(주) 외 2사

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단건축종합사무소 외 1사

2		예비준공 검사 현황

○ 일    시 : 2017.12.06.(수) 11:00 ~ 15:00

○ 장    소 : 회의실 및 현장

○ 예비준공검사자 : 도시철도토목부 정성환, 김찬오

○ 예비준공검사 입회자

- 기술지원기술자 : 김행배, 최명준

- 책임건설사업관리기술자 : 김우종

- 현장대리인 : 이상현

3		공사 추진현황

○ 공정율 : 0.94%(계획 : 1.56%, 대비 60.2%) 2017.12.06. 현재

○ 추진현황

- 레일운송 및 하화 : 당초 450개 ⇒ 변경 938개

- 자재투입 및 지하소운반 : 당초 450개 ⇒ 변경 737개

- 부대공사 :  당초 1식 ⇒ 변경 1식

4		예비준공검사 결과 및 조치계획

○ 여건에 따라 시공물량이 변경됨에 따라 차수간 공사물량 조정 필요

○ 실제 시공물량으로 내역조정하여 준공처리

붙 임 : 예비준공검사 서류 1부.  끝.