투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	남촌놀이터 조성공사 설계변경 시행

1. 시설과-7745(2017.12.13.)호와 관련입니다.

2. 『남촌놀이터 조성공사』와 관련 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 남촌놀이터 조성공사

나. 공사기간 : 2017. 12. 13. ~ 2018. 4. 8.

다. 위    치 : 중구 회현동 산 1-16번지 일대

라. 공사내용 : 어린이 놀이시설 8개소, 테크로드 128m, 식재공사 등

마. 도 급 비 : 금348,786,000원(금삼억사천팔백칠십팔만육천원)

****************************

사. 변경금액

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		448,720,090	449,462,090	50,742,000
도급비	공 급 가 액	317,078,182	363,207,273	46,129,091
	부가가치세	31,707,818	36,320,727	4,612,909
	합 계	348,786,000	399,528,000	50,742,000
관급자재		99,934,090	99,934,090	-

아. 예산과목 : 공공재생과, 공공재생계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충, 서울역일대 도시재생사업 추진, 시설비

붙 임    1. 설계변경 검토보고 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 원가제경비검증확인서 1부.  끝.

조경팀장	이무림		시설과장	12/13 김재균
협조자	재무팀장	김기중
시행	시설과-7750	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 4층(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5966	/전송	02-3783-5969	/		/	부분공개(6)