문서번호	물순환정책과-23810
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환정책팀장	물순환정책과장
신중선		송동욱	12/13 代윤정기
협조

2017년 빗물마을 조성사업 현장점검 결과 보고

2017. 12

물순환안전국

물순환정책과

2017년 빗물마을 조성사업 현장점검 결과 보고

시공품질 향상과 재해 없는 공사현장 관리를 위해 시행한 빗물마을 조성사업 현장점검 결과 보고임.

□ 추진근거

○ 2017년 빗물마을 조성사업 현장점검 계획(물순환정책과-23039, ‘17.12.1)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 빗물마을 조성 공사현장(4개소)

- 동대문구 제기동, 양천구 신월1동, 금천구 시흥동, 은평구 향림 빗물마을

○ 점검기간 : ’17.12.4 ~ 12.8

○ 점검방법 : 현장방문 육안 점검

○ 점 검 자 : 물순환정책팀장 외 4명

○ 주요 점검내용

- 빗물관리시설 시공관리 실태 및 현장･안전관리 실태

- 적기 공사완료를 위한 부진공정 만회대책 등 공정관리 실태

□ 점검결과

○ 총    평

【잘된 점】

- 빗물마을 조성사업의 목적과 취지를 지역주민이 공감하고 있으며,

- 빗물저금통 현장전시, 침투블록 선호도조사 등 주민참여 유도를 위해 사업시행청이 적극 노력함.

【개선할 점】

- 사업대상지 선정, 주민의견 수렴 등 사전절차 지연으로 공기 촉박

➪ 공사기간 확보를 위해 사업대상지 조기 선정 및 사전절차 신속 이행

- 빗물저금통 등 개인영역 빗물관리시설 다양성 부족

➪ ‘18년도 사업 실시설계를 본청에서 시행하는 방안 등 검토

○ 현장점검 지적사항

【양천구 신월1동 빗물마을 조성공사】

(지적사항) ∙빗물침투저류시설 전처리조로 낙엽 등 이물질 유입 우려 (조치계획) ∙현지시정 - 낙엽제거 및 전처리조로 이물질이 유입되지 않도록 조치
(지적사항) ∙식생체류지 보완 필요 (조치계획) ∙현지시정 - 식생체류지로 빗물 유입을 위한 유도수로 등 설치토록 조치

【금천구 시흥동 빗물마을 조성공사】

(지적사항) ∙현장관리 및 안전관리 부적정 (조치계획) ∙현지시정 - 빗물 유입구 및 자재 적치장 안전휀스 설치토록 조치

【동대문구 제기동 빗물마을 조성공사】

(지적사항) ∙현장 작업자 안전장비 미착용 (조치계획) ∙현지시정 - 근로자 안전모 착용토록 조치
(지적사항) ∙현장관리 부적정 (조치계획) ∙현지시정 - 자재 적치장 주변 비닐포장재 수거토록 조치

【은평구 향림 빗물마을 조성공사】

(지적사항) ∙공사안내판 미설치 (조치계획) ∙현지시정 - 공사안내판 설치토록 조치
(지적사항) ∙침투형 빗물받이 내 협잡물 유입 (조치계획) ∙현지시정 - 빗물받이 내 협잡물 제거토록 조치

□ 조치계획

○ 점검결과를 사업시행 부서에 통보하여 개선 및 재발 방지토록 조치

붙  임 : 현장 전경사진 1부.

【붙  임】 현장 전경사진

양천구 신월1동 빗물마을
금천구 시흥동 빗물마을
동대문구 제기동 빗물마을
은평구 향림 빗물마을