투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	최종 설계변경 시행-17년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

우리사업소에서 시행중인 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)에 대한 설계변경을(최종) 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 3. 15 ~ 2017. 12. 29

다. 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=359,400m,

도로표지병 설치 및 제거 N=520개소

라. 도 급 자 : (주)지아이엘건설 대표 김용이

마. 변경사유 : 시책사업 완료 보고 및 본공사 물량 조정 반영

바. 변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도급비	공급가액	973,670,000	711,465,000	감) 262,205,000
	부 가 세	97,367,000	71,146,500	감) 26,220,500
	계	1,071,037,000	782,611,500	감) 288,425,500

사. 예산과목

1) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 노면표시 도색 및 제거, 시설비【557,978,700원-36,179,400원】

2) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

【141,047,000원-80,481,000원】

3) 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

【141,046,500원-113,588,300원】

4) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은곳 개선, 시설비【56,051,600원-11,689,700원】

5) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기 사업, 시설비【2,959,000원+719,400원】

6) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비【81,994,000원-29,748,400원】

7) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비【13,200,000원-1,849,100원】

8) 자전거정책과, 자전거정책과, 자전거이용시설확충 및 관리, 자전거도로 유지보수, 시설비【52,470,000원-15,609,000원】

9) 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비【24,290,200원】

붙 임  1. 설계변경 방침서(최종) 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증대장 1부.

4. 합의각서 1부(별도송부).  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박성근		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/13 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-13261	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동67-1) 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/		/	부분공개(5)