문서번호	시설과-3914
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	12/13 이용태
협 조
	경리팀장		이전호
	시설관리팀장		장창원
	주무관		김영균
	주무관		김정중

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

설계변경 검토 보고

2017. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

「2017 지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」

설계변경 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「2017지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사」와 관련하여 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017지방폐교 활용 가족자연체험시설 조성공사(봉화 황평분교)

○ 공사기간 : 2017. 11. 2 ~ 12. 21

○ 총공사비 : 금278,978,160원(금이억칠천팔백구십칠만팔천일백육십원)

(도급액 : 금252,160,670원/ 관급자재 : 금26,817,490원)

○ 도 급 자

- 주계약자 : 주식회사 아이제이건설 대표 배석진

- 부계약자 : 주식회사 랜드콤프러스 대표 임공식

○ 공사내용 : 교사동, 화장실, 샤워실 리모델링, 야영데크, 편의시설 설치

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
건축	▶ 현장여건상 구조보강 공사에 따른 노후 천장재 철거 및 설치 수량 변경	▷ 노후된 천장재 철거 및 설치 수량 변경 ·PVC천정재철거 : 20㎡→277㎡ ·열경화성수지천장재 : 56㎡→307㎡ ·강관 조립식 말비계: 0조→6조	※기승인(1차) 시설과-3826 (2017.12.5.) ※최종 수량 반영
	▶ 배관 크기 및 수압 현장여건상 세척장 수도 연결 선로 변경	▷ 세척장 수도 선로 변경(수량 변동없음)
	▶ 석면 철거 전문 조사기관 검사 진행 요청	▷ 석면 철거 전문 조사기관 검사 ·석면조사비 : 0식→1식
	▶ 온수 보일러 도면과 내역서 상이에 따른 변경	▷ 도면에 맞춰 변경 ·전기온수기 : 4set→2set
	▶ 지붕 공사에 안전에 따른 고공 장비 요청	▷ 고공 장비 추가 ·스카이다이차 : 0일→1일
	▶ 캠핑장 간판 요청(교육정책과)	▷ 캠핑장 간판 추가 ·캠핑장 간판 : 0EA→1EA

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
조경	▶텐트데크 8개 추가 설치 및 낙상사고 예방 데크 높이 낮춰 시공 요청(교육정책과)	▷ 텐트데크 8개 추가설치 ·레미콘 인력운반 타설 : 3㎥ → 5㎥ ·레미콘 : 3㎥ → 5㎥ ·합판거푸집 설치 및 해체:39㎡→65㎥ ·텐트평상설치(H450) : 12개소→0개소 ·텐트평상설치-1(H200) : 0개소→20개소 ·텐트데크명패 : 12개소→20개소 ▷ 8개 추가 설치 지역 토공사 ·터파기 : 148㎥ → 247㎥ ·토사운반 : 148㎥ → 247㎥	※기승인(1차) 시설과-3826 (2017.12.5.)
	▶도면과 현장 여건 상이에 따른 변경 ▶유지관리 및 미관을 고려한 포장 변경	▷ 8개 추가 설치 지역 포장 추가 및 혼합골재 제외 ·쇄석포장(T200) : 1,480㎡ → 0㎡ ·쇄석포장(T100) : 0㎡ → 2,710㎡ ▷ U형측구 수량 변경 ·U형측구설치 : 20m→6m ▷스틸그레이팅 설계서 누락에 따른 반영 · 스틸그레이팅 : 0m→6m ▷ 현장여건 고려하여 데크 배치
관급	▶ 현장 여건을 고려하여 안내판 변경 ▶ 텐트데크 8개 추가(기반영)	▷ 안내판 변경 ·시설안내판 : 7개소→4개소 ·방향표지판 : 7개소→4개소 ·시설이용안내판 : 0개소→2개소 ▷ 데크 변경 ·데크 : 255㎡→425㎡	※기승인(1차) 시설과-3826 (2017.12.5.)

□ 소요예산 내역(개략금액)

(단위 : 원)

구 분	소요 금액				비고
	당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비	278,978,160	313,200,000	증	34,221,840
공 급 가 액	229,236,972	248,520,998	-
부 가 가 치 세	22,923,698	25,386,789	-
도 급 공 사 비	252,160,670	279,254,680	증	27,094,010
관급자재비	26,817,490	33,945,320	증	7,127,830

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	공사비	공사비집행액				비고
		발주액 (a)	계약액 (b)	잔액 (c=a-b)	관급자재
가족자연 체험시설	313,200,990	286,383,500	252,160,670	34,222,830	26,817,490

‣ 예산과목

- 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연          체험시설 조성 운영, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 공사연기 검토

○ 연기사유

- 현재 75%의 공정을 진행하고 있으나, 기온이 영하권인 동절기에 습식        공사(콘크리트, 미장작업 등) 및 굴착공사가 어려운 상황으로 공사품질 향상        및 안전사고 예방을 위한 기간 연장

○ 준공기한 변경

- 당초 : 2017.11.02. ~ 2017. 12.21.

- 변경 : 2017.11.02. ~ 2018. 02.28.

○ 지체산금 부가 검토

- 지체상금 부과여부 : 미 부과

□ 검토의견

○ 상기 각 항목별 기 실정보고 사항에 대하여 설계 변경 시행코자 함

○ 계약부서에 설계변경 시행 및 공사기간 변경 계약 요청

○ 예산 조치사항

- 공사비 증액분(34,221천원)은 공사 낙찰차액을 활용

붙  임 : 변경내역서 1부. 끝.