문서번호	교량안전과-22726
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
임승민	정준용	12/13 한유석

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.12.

교량안전과

〔특수교량팀〕

한강상 PSC교량 안전강화공사〔올림픽대교〕실정보고 검토

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 대해 책임건설사업관리기술자가

제출한 실정보고에 대한 검토 보고 임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)

공사기간 : 2017. 6. 02 ~ 2017. 12. 26

공사개요 : 아스팔트 포장 155.7a, 교면방수 12,695㎡

콘크리트 보수 351㎡, 신축이음 보수 77.5m 등

공 사 비 : 1,787,176천원

(도급비 1,408,576천원, 관급비 294,110천원, 이전비 84,490천원)

시 공 사 : ㈜송화건설 손 성 철

감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 2

Ⅱ		보 고 내 용

가. 교면방수 표면처리 실사 결과 반영

○ 시공단가 변경

- 당초 10,734원/㎡ ⇒ 변경 8,739원/㎡, 감) 1,995원/㎡

○ 공사비 변경내역

- 당초 239,250천원 ⇒ 변경 181,820천원, 감) 57,430천원

※ 동일 방수공법이 적용된 『오류고가 보수공사』실사 결과와 비교 검토하여 작은 단가 적용

나. 관급자재(아스콘) 및 이전비(폐기물 등) 수량 정산

○ 관급자재(내유동성 아스콘)

- 당초 2,985톤 ⇒ 변경 3,423톤, 증) 438톤

- 공사비 변경내역 : 당초 294,110천원 ⇒ 변경 327,590천원, 증) 33,480천원

○ 이전비(폐기물 등) 정산

- 당초 3,181톤 ⇒ 변경 4,440톤, 증) 1,259톤

※ 혼합폐기물 당초 509톤 ⇒ 변경 1,163톤, 증) 654톤

기타 검지선, 측량점 복구 공종 미발생에 따른 공종 제외

- 이전비 변경내역 : 당초 86,292천원 ⇒ 변경 97,026천원, 증) 10,734천원

Ⅲ		조 치 계 획

○ 상기 책임건설사업관리기술자 보고내용과 같이 교면방수 표면처리 실사  결과 반영과 관급자재(아스콘) 및 건설폐기물 수량 변경 등에 대하여 설계

변경시 정산(감 13,216천원) 코자 합니다,

※ 공사비 변경 내역(감 13,216천원)

- 교면방수 표면처리 실사 결과 반영 : 감) 57,430천원

- 관급자재(아스콘) 정산 : 증) 33,480천원

- 이전비(폐기물 등) 정산 : 증) 10,734천원

붙임  건설사업감리단 실정보고 관련공문 1부. 끝.