문서번호	도로보수과-13246
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	12/13 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(최종)

우리사업소에서 시행중인『17년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사』시책사업 완료보고 및 본 공사 물량 증·감에 따른 최종 설계변경 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 17년 소방관서 긴급출동신호시스템 사업 작업완료 보고【12059호(‘17.11.14.)】

○ 2017년 교통사고 잦은곳 개선사업 작업완료 보고【12899호(‘17.12.6.)】

○ 도로교통소통 개선사업(양천구 목동오거리) 작업완료 보고【12885호(‘17.12.6.)】

○ 도로교통소통 개선사업(이펜하우스외 1개소) 작업완료 보고【13024호(‘17.12.8.)】

○ 2017년 횡단보도 확충 정비사업 작업완료 보고【13070호(‘17.12.11.)】

○ 도로교통소통 개선사업(영등포시장역 교차로) 작업완료 보고【13078호(‘17.12.11.)】

○ 17년 자전거도로 유지보수 1,2단계 사업 작업완료 보고【13082호(‘17.12.11.)】

Ⅱ		사업개요

○ 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사개요 : 차선도색 및 제거 L=334,543m, 도로표지병 설치 및 제거 N=481개소

○ 공사기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 29.

○ 공 사 비 : 1,391,268천원

(도급비 1,071,037천원, 관급비 289,613천원, 이설비 30,618천원)

○ 도 급 자 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

Ⅲ		주요공종 및 사업비 변경 현황

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수 량		비고(사유)
			당 초	변 경
1	차선(재)도색	m	276,407	231,322	- 시책사업 물량 반영(완료보고) 본 공사(긴급복구, 굴착복구 포함) 공종별 물량 증·감 반영
2	차선제거	m	58,136	48,188
3	도로표지병 철거 및 설치	개소	481	354
4	시선유도봉 철거 및 설치	개소	0	91

○ 시책사업별 완료보고 : 붙임 참조

○ 예산별 정산금액

사 업 명	정산금액
	총 공사비	도급비	관급비	이설비및기타
노면표시 도색 및 제거	688,354,390	521,799,300	166,555,090	-
노후포장도로정비공사 (17년 포장도로 긴급복구)	88,831,650	60,566,000	28,265,650
도로굴착복구공사 (17년 포장도로 굴착복구)	39,397,880	27,458,200	11,939,680
교통사고잦은곳 개선사업	115,927,160	44,361,900	37,120,660	34,444,600
횡단보도 확충 정비사업	14,089,740	11,350,900	2,738,840
교통사망사고 줄이기사업	4,285,880	3,678,400	607,480
도로교통소통개선사업	63,882,740	52,245,600	6,533,140	5,104,000
중앙버스전용차로 흐름개선사업	97,816,700	24,290,200	3,585,500	69,941,000
자전거도로 유지보수(1,2단계)	41,459,960	36,861,000	4,598,960
계	1,154,046,100	782,611,500	261,945,000	109,489,600

○ 최종 설계변경 금액

구 분	당 초	변 경	증·감
총 공사비	1,391,268,300	1,154,046,100	감) 237,222,200원
도 급 비	1,071,037,000	782,611,500	감) 288,425,500원
관 급 비	289,613,000	261,945,000	감) 27,668,000원
이설비및기타	30,618,300	109,489,600	증) 78,871,300원

Ⅳ		조치계획

○ 시책사업 완료보고 내역 및 본 공사 공종별 물량 증·감, 관급자재 물량 변경을 반영하여 위와 같이 최종 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임  1. 변경설계서(최종) 1부.

2. 시책사업별 결과보고 각 1부.  끝.