투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행『2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(영등포교차로 외 4개소)』

『2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(영등포교차로 외 4개소)』에     대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2017년 교통사고 잦은 곳 개선사업 교통신호기 공사(영등포교차로 외 4개소)

2. 공사기간 : 2017.08.02. ~ 2017.12.20.

3. 공사위치 : 영등포교차로 외 4개소

4. 도 급 자 : ㈜은하전기 대표 정기덕

5. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공급가액	62,678,300	40,807,920	감) -21,870,380
부가가치세	6,267,830	4,080,790	감) -2,187,040
도 급 비	68,946,130	44,888,710	감) -24,057,420

6. 설계변경 사유 : 계약물량 변경사항(증,감) 반영 및 법정보험료(건강보험료, 연      금보험료 등) 정산

7. 예 산 과 목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리

강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비(401-01)

붙임문서 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 갑지 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

주무관	고두규		기전과장	代장종창		강서도로사업소장	12/13 김용제
협조자	주무관	정경성
시행	기전과-16356	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)