과 장		12/13 김권일	심사자	정회곤		설계자	박성근		설 계	심 사		결 재
									2017년12월12일	2017년12월13일
설 계 변 경 서(최종)
	공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 1,391,268,300원			금 1,154,046,100원			감) 237,222,200원
	도급비	공 급 가 액			금 973,670,000원			금 711,465,000원			감) 262,205,000원
		부 가 가 치 세			금 97,367,000원			금 71,146,500원			감) 26,220,500원
		계			금 1,071,037,000원			금 782,611,500원			감) 288,425,500원
	관 급 비				금 289,613,000원			금 261,945,000원			감) 27,668,000원
	이설비 및 기타				금 30,618,300원			금 109,489,600원			증) 78,871,300원
공사개요 - 당 초 : 차선도색 L=276,407m, 차선제거 L=58,136m, 도로표지병 설치(제거) N=481개 - 변 경 : 차선도색 L=231,322m, 차선제거 L=48,188m, 도로표지병 설치(제거) N=354개, 시선유도봉 설치(제거) N=91개