문서번호	도시철도사업부-13051
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
원길묵		김형건	12/13 박동룡
협조
	주무관		임병길

2017년 건설 중요기록물 DB구축 사업

준공기한 연기 검토 보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

2017년 건설 중요기록물 DB구축 사업

준공기한 연기 검토 보고

「2017년 건설 중요기록물 DB구축 사업」의 세부적인 검수 및 성능시험 실시를 위해 소요되는 기간 확보 관련 준공기한 연기 검토 보고임

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 건설 중요기록물 DB구축 용역

○ 용역기간 : 2017.6.23. ~ 2017.12.31.

○ 용 역 비 : 378,000천원

○ 용 역 사 : ㈜디앤디기술 (대표이사 민태영)

□ 추진현황

○ '17.06.20. : 계약

○ '17.06.23. : 착수

○ '17.12월 현재 : 중요기록물 DB구축 완료(도시철도국)

□ 준공기한 연기

○ 연기사유

- 건설 중요기록물 DB구축완료에 따라, DB구축 결과물에 추가 기록물 확인과 기록관리시스템, 보존매체(CD, 외장하드)의 정상작동 및 One-PMIS와 연계 작동 여부를 세부적으로 점검하기 위한 용역기간 부족 (31일)

○ 용역기간 변경 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	'17.06.23. ~ '17.12.31.	'17.06.23. ~ '18.01.31.	31일 연기

※ 계약금액 변동 없음

○ 연기 귀책소재 : 계약자 귀책사유 없음(지체상금 미부과)

□ 조치계획

○ 상기 내용과 같이 용역 준공기한 연기하여 중요기록물 DB구축에 만전을 기하고자 함