설계변경 심의 의견서

대시민공개

1. 용역명: 2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역

신청부서명	시설관리과
작 성 자	박 상 현
제출년월일	2017.12.13(수)

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시: 2017.12.13.(수) 15:00

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

최명익

12/13

최명익

위    원

시설관리팀장

박종일

박종일

타당함

위    원

급수설비팀장

배성호

배성호

타당함

위    원

주무관

이훈재

이훈재

적정함

위    원

주무관

유광창

유광창

적정함

위    원

주무관

박행종

박행종

적정함

담    당

주무관

박상현

박상현

설계변경 요약서

□ 용역개요

○ 용  역  명: 2017년 중랑구, 동대문구 관내 상수도공사(단위공사) 건설폐기물 처리용역

○ 도  급  자: 광일토건환경(주) 대표 박노일

○ 계약기간: 2017.04.25. ～ 2017.12.31.

○ 물량 및 금액 변경 내역

구 분		당 초	변 경	증⋅감	비 고
건설페기물 운반(㎥)	폐아스콘	1,694	1,935	증)241
	폐콘크리트	-	58	증)58
	폐토석	850	88	감)762
	계	2,544	2,081	감)463
건설폐기물 처리(톤)	폐아스콘(중간처리)	1,612	4,547	증)2,935
	폐아스콘(재생처리)	2,368	-	감)2,368
	폐콘크리트	-	134	증)134
	폐토석	1,445	149	감)1,296
	계	5,425	4,830	감)595
용역비(천원)		124,691	141,478	증)16,787

□ 설계변경 주요사유 및 세부목록

가. 용역시행에 따른 물량 증감

○ 폐기물 운반량: 2,544㎥ → 2,081㎥(감 463㎥)

○ 폐기물 처리량: 5,425톤 → 4,830톤(감 595톤)

나. 폐아스콘 재생처리 불가로 중간처리로 변경

○ 관련근거

- 광일 17-0623호(2017.06.22.) 폐아스콘(무대)처리비 반영 실정보고

⋅재생아스콘 생산업체의 폐아스콘 반입 거부로 폐아스콘 중간처리

⋅시설관리과-17328(2017.06.27.)호 현장 실정보고에 대한 검토사항 보고: 승인

- 공사감독2처-13948(2017.11.17.) 현장 실정보고

⋅송배급수관 공사 현장에서 발생되는 폐아스콘은 토사 및 이물질이 혼입된 덩어리 형태로 분리 배출(재생 처리) 불가

- 시설관리과-32854(2017.11.24.)호 현장 실정보고에 대한 회신: 폐아스콘 중간처리 승인

□ 설계변경 심의(검토) 내역

○ 물량변동의 적정성 여부

○ 관련규정 및 적법성 여부

○ 설계변경 세부내용 및 사유 등

붙임: 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 사유서 1부.

3) 설계변경 검토 보고서 및 관련 공문 각 1부.  끝.