투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	지하철 9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사(총차, 2차) 설계 변경시행 및 계약의뢰

1. 조달청 관리번호 1*******02, 계약번호(2차********6-00(2016.11.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호로 계약되어 시행중인『서울지하철9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사』(총차, 2차)의 시공물량 증․감 사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경 시행 및 계약의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 지하철9호선연장건설(3단계) 1구간 송변전공사(총차,2차)

나. 계 약 자 : 거성일렉콤(주) 대표 박성래 외 1인

다. 계약기간 : ‘15.08.20.~`18.02.04.(2차‘16.12.01.~`18.02.04.)

라. 설계변경내역

구 분		변경전	변경후	증·감	비고
총 차		5,885,611,900	5,875,172,000	-10,439,900
1 차		1,000,000,000	1,000,000,000	-	기 준공
2차	소계	4,885,611,900	4,875,172,000	-10,439,900	설계변경 (ESC포함)
	내역변경	4,885,611,900	4,728,920,000	-156,691,900
	ESC		146,252,000	146,252,000

마. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 관련도서(별도송부) 1부.  끝.

2. 설계변경 내역서(총차,1차,2차) 각 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재영		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	12/13 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-14997	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)