문서번호	방재시설부-21282
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	방재시설과장	방재시설부장
정호운	이도헌	12/13 남궁용

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건설폐기물처리용역 -

설계변경(1회) 검토 보고

2017. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

-남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건설폐기물처리용역-  설계변경 검토보고(1회)

남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건설폐기물처리용역의 실정보고 사항 반영을 위한 설계변경(1회)을 시행하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

1		용역개요

□ 용 역 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 건설폐기물처리용역

□ 용역내용 : 폐콘크리트 122톤

□ 계약금액 : 금3,700,000원(삼백칠십만원정)

□ 용역기간 : 2017. 09. 13. ~ 2018. 03. 12.

□ 계 약 자 : 서울NET㈜  대표자 안성효

2		설계변경 검토

□ ‘17년 12월 현재 기 계약물량을 반출하고 사업 부지내 터파기시 발생한 폐콘크리트 처리 등 현장 실정보고한 사항 반영을 위한 설계변경임.

※ 추가 발생 예정인 혼합폐기물 수량 제외

□ 계약자 폐기물 처리현황(12월초 현재)

구 분		처리량	금액	처리기간
폐콘크리트	당초	122톤	3,700,000원	‘17.10.～’17.12월초
	변경	182톤	5,522,000원	-

□ 설계변경(1회) 금액 (용역기간 변경없음)

구 분		금 액(원)
		당 초	변 경	증 ․ 감
총 용 역 비		3,700,000	5,522,000	증1,822,000
용역비	공 급 가 액	3,363,637	5,020,000	증1,656,363
	부가가치세	336,363	502,000	증165,637
	소 계	3,700,000	5,522,000	증1,822,000

3		조치계획

□ 상기와 같이 설계변경(계약금액 조정)하여 용역 추진에 만전을 기하고, 계약  부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 1. 관련공문 및 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.