문서번호	급수운영과-28821
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(4,5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최성태	代최성태	12/13 유용일
협 조

설계변경(1회)에 따른 계약금액 조정 결과보고

(보광배수지 내부 방수방식공사)

2017. 12

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『보광배수지 내부 방수·방식공사』

설계변경(1회)에 따른 계약금액조정 결과보고

1. 심의대상

가. 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

나. 공사개요 :

당초	변경
패널식 방수방식 2,930㎡ 도막식 방수방식 9,793.8㎡ 단면보수 920㎡ 폼타이제거 단면보수 7,000개	패널식 방수방식 2,930㎡ 도막식 방수방식 9,704.2㎡ 단면보수 22㎡ 폼타이제거 단면보수 7,000개 폼타이제거 후 충진 18,804개

다. 계약기간 : 2017. 08. 28 ~ 2018. 05. 26.

라. 계약상대자 : 우제이건설(주) 대표 김 주 연

마. 설계변경금액 : (증) 148,987,240원

***************************************************************

2. 관련 공문

가. 재무회계과-16506(2017.12.12.) 계약금액 조정 결과통보

******* 조정 요청금액

당초: 1,077,000,000원 → 조정: 1,046,000,000원(감:31,000,000원)

3. 설계변경 현황

가. 공사비 변경 개요

구 분	금 액(원)
	당 초	변 경
도 급 비	***********	1,046,000,000

4. 심의 내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종 단가 산출 및 물량 증 ▪ 감  적용 적정여부

▸ 신규공종 : 타일철거 등 2개 공종

▸ 단가적용 : 계약단가 및 설계변경 산출단가에 낙착율(86,7489)을 곱한                       변경단가를 적용

▸ 물량(증·감)

- 보광배수지 1지 : 그라인딩(콘크리트+페인트면) 등 9개 공종

- 보광배수지 2지 : 그라인딩(콘크리트+페인트면) 등 9개 공종

다. 제경비 적정 산정 및 적용 적정성

라. 부대공 적정 산정 검토

마. 계약금액 조정 (설계변경) 등.

5. 조정 결과

가. 단가조정

▸ 폼타이제거 단면보수(1지, 2지) 12,902개소

⇒ 폼타이제거 단면보수 3,500개소, 폼타이제거 후 충진 9,402개소로 조정

나. 기타사항

▸ 보험료, 퇴직공제부금바, 산업안전보건관리비 등 정산이 필요한 항목은

자료를 제출받아 향후 정산처리

6. 조치 의견

-  본부 재무회계과의 계약금액 조정결과에 의거 설계변경 및 변경계약 의뢰를 시행 하고자 합니다.

붙임문서 :  1) 계약금액 조정 결과 통보 1부.

2) 설계변경 내역서(조정 후) 1부.

3) 조정결과 검토서 1부. 끝.