투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행【2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역】

1. 우리사업소에서 시행중인 2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘    운반 및 처리용역에 대한 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역

나. 용역기간 : ‘17.06.05 ~ ‘17.12.15

다. 공사개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 22,500톤

라. 도 급 자

- 운반업체 : ㈜삼양이앤디 대표 최훈성

- 처리업체 : ㈜드림아스콘 대표 박광동, 서정윤, ㈜검단아스콘 곽순자

마. 변경사유 : 포장노선 추가에 따른 폐기물 물량 증가

바. 변경내역

- 용 역 비                                                 (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비고
도급비	공급가액	207,300,000	247,030,000	증)39,730,000
	부가세	20,730,000	24,703,000	증) 3,973,000
	계	228,030,000	271,733,000	증)43,703,000

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장        도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 2017년 노후포장도로정비공사(강서2구역) 설계변경 검토보고(정산) 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 1부.

3. 합의각서 1부(별첨). 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/13 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-13260	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7951	/전송	02-2657-7960	/	arikdm@seoul.go.kr	/	부분공개(5)