투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약_이동형 문화편의시설(무빙스토어) 디자인 및 제작설치

1. 한강관광사업과-2557, 2560(2017.12.7.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『이동형 문화편의시설(무빙스토어) 디자인 및 제작·설치』와 관련하여 아래와 같이 변경(정산)계약  하고자 합니다.

가. 계약명: 이동형 문화편의시설(무빙스토어) 디자인 및 제작·설치

나. 계약자: 에스엔엔지니어링(주) 대표 우문식

보편적인건축사사무소 대표 전상규

다. 위치: 잠실한강공원(송파구 잠실동 1-1)

라. 사업개요

○ 2.4×6.0m 컨테이너 18개 제작·설치

○ 공연무대, 소규모 캐노피 설치 등

마. 제작·설치 변경(정산)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총도급비	1,340,700,000	1,483,900,000	증)143,200,000
디자인	20,000,000	20,000,000	-
설계	56,000,000	56,000,000	-
제작·설치	1,142,818,182	1,273,000,000	증)130,181,818
부가세	121,881,818	134,900,000	증) 13,018,182

바. 변경사유

- 운영계획 검토과정에서 필요한 시설 변경 및 신규 설치

사. 예산과목: 한강공원 이용 및 생태환경개선, 한강관광자원화, 이동형 문화편의시설(무빙스토어)조성, 시설비(401-01)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 변경(정산) 내역서 1부.  끝.

주무관	김윤미		총무과장	박병현		총무부장	12/13 박기용
협조자
시행	총무과-20763	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 총무부 총무과	/
전화	02-3780-0719	/전송	02-3780-0740	/	hjymhg@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)