문서번호	설비부-21171
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
진종구		오삼록	12/13 권오식
협조

『석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사』

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부 설비부

『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』

실정보고사항 검토보고

「종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사」관련하여 건설사업관리기술자로부터 제출된 관급자재 변경에 관한 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

□  공사개요

공 사 명 : 종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사

위    치 : 세종대로 사거리~동묘앞 역

규    모 : 가로등 이설 29개소, 신호등 신설 49개소

공사기간 : 2017.09.13. ~ 2018.02.28.

계약금액 : ￦823,416,000원

계 약 자 : 대현산업기술(주)

□  관련근거

관급자재 변경 실정보고(종로감17-78, `17.12.08)

□  변경내용

구 분	당 초	변 경
규 격	8회로 양방향수신기	8회로 수신기 비내장형	4회로 수신기 비내장형	4회로 단방향 수신기
수 량(면)	10	5	4	1
단 가	4,895,000	3,080,000	2,640,000	3,300,000
금 액	48,950,000	15,400,000	10,560,000	3,300,000
합 계(원)	48,950,000	29,260,000
변경사유	정류장 가로등 점·소등 방식 : 14개소(타이머), 1개소(단방향 수신기) 정류장 운영사와 협의결과 가로등 운영방식(타이머) 등이 설계시방(양방향수신기)과 상이하여 가로등 분전함의 규격 변경이 필요함

□  감리자 의견

가로등 운영방식에 맞게 가로등 분전함의 변경이 필요함.

□  보고자 의견

감리의 검토의견이 타당하여 실정보고를 승인하고 관급자재의 변경계약을 추진코자 함.

붙임  검토의견서 1부.