	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약변경 시행 및 의뢰(암사1정수장 탈수설비 개량 배관공사)

우리 부에서 시행 중인 ‘암사1정수장 탈수설비 개량사업’과 관련하여, 아래와 같이 계약사항 변경을 시행 및 요청하오니, 조차하여 주시기 바랍니다.

1. 계약현황

가. 건    명 : 암사1정수장 탈수설비 개량 배관공사

나. 사업내용 : 슬러지펌프 및 배관류 설치 등

다. 계약대상 : 서전엔지니어링(주)

라. 계약기간 : 2017.10.10.~2017.12.20.

마. 계약금액 : 금395,088,440원

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(정수장시설정비)

2. 계약변경 내역

가. 계약기간 : 변경없음

나. 계약금액 : 증)금90,762,140원(금구천칠십육만이천일백사십원)

▪ 당초 : 금395,088,440원(금삼억구천오백팔만팔천사백사십원)

▪ 변경 : 금485,850,580원(금사억팔천오백팔십오만오백팔십원)

▪ 사유 : 배관 및 작업대 물량증가, 불용배관 철거 등

붙임  1. 보고서  1부.

2. 계약변경 합의서 1부.

3. 계약심사 결과서 2부.  끝.

	생산부장
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	12/13 유성종
협조자	주무관	안정현		주무관	김성민
시행	기전설비과-9460	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(5)