아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	장기계속용역 변경계약(총차) 및 차수계약(2차) 의뢰

1. 물순환정책과-23669(2017.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 ‘서울형 물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기 모니터링 용역’의 계약변경 사유가 발생하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하고,

3. 장기계속용역의 2차년도 차수계약 체결을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

【용역개요】

가. 용 역 명 : 서울형 물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 용역(장기계속계약)

나. 계약금액 : 금1,340,000,000원(금일십삼억사천만원) - 총부기금액

다. 계약기간 : 2016.8.26. ~ 2019.8.25.(전체)

라. 계 약 자 : 한국건설기술연구원 대표 이태식 외 1

마. 예산과목 : 물순환정책과(일반회계), 깨끗한 물관리, 물환경개선 및 관리, 서울형 물순환 협력협업 통합매뉴얼 구축 및 장기모니터링 연구, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

【총차계약 변경개요】

가. 변경내용

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감
계약기간		’16.8.26.~’19.8.25	’16.8.26.~’19.8.25	변경없음
계약금액		1,340,000	1,340,000	변경없음
지분	건기연	1,072,000(80.00%)	707,000(52.76%)	감)365,000(27.24%)
	동 일	268,000(20.00%)	633,000(47.24%)	증)365,000(27.24%)

나. 변경사유

1) 당초 과업내용의 구체화 및 변경에 따라 기존 과업분담비율로는 효율적 용역수행 곤란

2) 구성원 간 분담비율, 참여기술자, 예정공정표, 계약내역서 변경을 통해 과업의 효율적 수행 도모

【2차년도 차수계약】

가. 계약기간 : 2017.12.1. ~ 2018.8.31

나. 계약금액 : 금600,000,000원(금육억원)

1) 지분금액 : 건기연 300,000,000원(50%), 동일 300,000,000원(50%)

붙  임  1. 변경 계약내역서(총차) 1부.

2. 계약내역서(2차) 1부.

3. 변경 과업내용서 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 용역 계약변경 자문회의 결과 및 조치계획 1부.  끝.

	물순환정책과장
주무관	신중선		물순환정책팀장	송동욱		물순환정책과장	12/13 안대희
협조자	계약1팀장	조현
시행	물순환정책과-23779	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-33762	/전송	02-2133-1043	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개