		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 회신-공사기간 연기 승인 : 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사 2차)

1. 업무지시현장 : 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사 주식회사 트래픽스

2. 작 성 일 자 : 2017-12-14 16:12:01

3. 지 시 내 용

가. ㈜트래픽스 TR-감-1203호(2017.12.12.)와 관련입니다.

나. “퇴계로 도로공간재편사업 전기공사(2차)”와 관련하여 실정보고한 공사기간의          연기 요청에 대하여 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고 회신하오니 변경

계약 및 공사시행 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 승인내용 : 공사기간 연기 승인

- 당초 2017년 12월 31일에서 2018년 6월 29일까지 연기.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 12/14 代이호완
협조자
시행			설비부-21354									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개