문서번호	도시철도설비부-15092
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		차량과장	도시철도설비부장
장재순		강치석	12/14 구자훈
협조
	경리과장		최정수

도시철도 9호선 전동차 70량 구매 관련

납품기한 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

도시철도 9호선 전동차 70량 구매 관련

납품기한 연장 검토 보고

『도시철도 9호선 혼잡도 개선 및 증차 계획』에 따라 계약 체결되어 시행중인 전동차 70량 구매의 납품기한 연장 검토 결과를 보고 드림.

	구매개요
○ 구매수량: 전동차 70량 구매 ○ 계약기간: 2015. 5. 29. ~ 2017. 12. 31. ○ 계약금액: 97,564,733천원 ○ 계약업체: 현대로템(주)

Ⅰ		관련 근거

○ 물품구매계약일반조건 제24조(지체상금) ③항 4호 및 제25조(계약기간의 연장)

Ⅱ		연기 사유

○ 현대로템(주) 국내PM 17-452(’17. 12. 13.)호와 관련

- 증설유치선 미준공에 따른 증량작업 중단: ’17. 7. 15.~10. 14.(92일)

- 3단계 구간 종합시운전에 따른 증량작업 중단: 12. 1.~12. 30.(30일)

○ 증량용 차량 16량에 대해 증량작업 중단으로 약 122일 지연됨

Ⅲ		보고자 의견

○ 계약금액 변경없이, 증설유치선 미준공 및 3단계 구간 종합시운전 실시에 따른

증량작업 중지지시와 관련 증량작업을 시행하지 못한 120일에 대해 납기연장이

타당하다고 판단됨.

Ⅳ		계약변경 내용

○ 납품기한 변경 내역

구 분	수량	납품기한		비고
		당초	변경후
4량 편성	32량	’16. 12. 31.	’16. 12. 31.	변동없음
6량 편성	6량	’17. 12. 31.	’17. 12. 31.	변동없음
4량 편성	16량	’17. 12. 31.	’17. 12. 31.	변동없음
	16량	’17. 12. 31.	’17. 04. 30.	4개월 연장
지정예비품 등	1 식	’17. 12. 31.	’17. 12. 31.	변동없음

○ 계약금액 : 변경 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅴ		향후 계획

○ ’17. 12. 14.: 변경계약 의뢰

○ ’18. 04. 30.: 70량 예비주행 완료(예정)

○ ’18. 06. 30.: 70량 본선 운행 투입(예정).  끝.