문서번호	급수운영과-28218
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	북부수도사업소장
최용진	장종욱	12/14 代이병호
협 조

설계변경 검토보고(공릉배수지(5,6지)내부방식공사)

2017. 12

북부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계 변경 검토 보고서

[공릉배수지(5,6지)내부방식공사]

『공릉배수지(5,6지)내부방식공사』 시행 중 현장 시공여건 변화 등에 따른 신규단가 및 시공물량 증․감 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 공릉배수지(5,6지)내부방식공사

□ 공사규모 : 패널식 방수,방식 4,564㎡

도막식 방수,방식 15,996㎡

시트식 방수,방식 12,150㎡

폼타이단면보수 13,500개소

균열보수 1,000m

단면보수 1,440㎡

□ 공사기간 : 2017.06.26. ~ 2017.12.22.

□ 도 급 비 : 1,831,063,760원

□ 계 약 자 : 신봉건설㈜   대표 최기병

Ⅱ		설계변경 근거

□ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

□ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제40호)

- 제13장(공사계약 일반조건) 제6절 공사설계의 변경

Ⅲ		설계변경 개요

□ 설계변경 사유 : 신규공종 및 시공물량 증･감 발생 (첨부 설계변경내역서 참조)

- 신규공종 : 게단나난교체(5,6지 2개소) 공종

- 시공물량 증감 공종 : 그라인딩외 15개 공종

Ⅳ		계약금액 조정

□ 계약금액 변경내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감(원)	비 고
도급비	*************	*************	***************	*******
공급가액	*************	**************	*************
부가가치세	*************	**************	**************

Ⅴ		보고자 의견

□ 상기와 같이 「공릉배수지(5,6지)내부방식공사」 계약금액이 64.18% 증액(1,022,236,240원)되어, “2016년 상수도사업 설계심사 추진계획(재무회계과-268호 ‘16.01.07.)”에 의거 도급비 증액시(10%이상) 본부(재무회계과)에 설계변경 심의토록 되어 있어 본부에 설계변경 심의 의뢰코자 하며,

□ 본부 설계심의 결과에 따라 설계변경 및 계약 시행코자 합니다.

붙임 : 설계변경내역서 및 관련자료 1부.  끝.