투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[서울혁신파크 1단계 조성사업 설비공사]

1. 설비부-21325(2017.12.14.)호와 관련입니다.

2.『서울혁신파크 1단계 조성사업 설비공사(기계·전기·통신)』에 대하여 아래와 같이     준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 의뢰 내용

구 분	차 수	공 사 기 간		비고
		당 초	변 경
기계공사	(총차)	2017.01.02. ~ 2017.12.15.	2017.01.02. ~ 2018.01.12.	공사금액 변동없음
	(2차)	2017.02.14. ~ 2017.12.15.	2017.02.14. ~ 2018.01.12.
전기공사	(총차)	2017.01.02. ~ 2017.12.15.	2017.01.02. ~ 2018.01.12.
	(2차)	2017.03.23. ~ 2017.12.15.	2017.03.23. ~ 2018.01.12.
통신공사	(총차)	2017.01.02. ~ 2017.12.15.	2017.01.02. ~ 2018.01.12.
	(2차)	2017.07.10. ~ 2017.12.15.	2017.07.10. ~ 2018.01.12.

나. 귀책소재 및 연기사유

1) 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과
3) 연기사유 : 선행공정 지연에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서(기계·전기·통신) 각 1부

3. 준공기한 연기 합의각서(기계·전기·통신)   1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	여인웅		설비부장	12/14 代유병기
협조자	주무관	김도형		경리과장	최정수
시행	설비부-21357	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)