문서번호	문화융합경제과-9659
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		문화산업정책팀장		문화융합경제과장
김성미		박주선		12/14 代박주선
협 조

봉제역사관 전시장 설치 추진계획

2017. 12

.

경제진흥본부

(문화융합경제과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

봉제역사관 전시장 설치 추진계획

봉제역사관 전시․공간 기본기획 용역이 완료됨에 따라 전시컨텐츠 설치 등 전시장 설치 용역을 추진하고 개관준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 시설개요

❍ 위    치 : 종로구 창신동 647-50,6 (동대문역 도보8분 거리)

❍ 규    모 : 대지면적(266.8㎡), 연면적(499.12㎡), 지하1층・지상4층

❍ 공간구성 : 전시 공간, 디지털아카이빙 공간, 코워킹 공간(팹랩), 시민소통 공간, 카페, 다목적 공간, 사무공간 등

□ 봉제역사관 층별 공간구성

Ⅱ		필요성 및 추진경위

□ 전시장 구축을 위한 설계 및 제작․설치용역 추진 필요성

❍ 사양산업으로 인식되고 있는 봉제 가치재발견 및 봉제인 자긍심 고취, 지역 커뮤니티와 지역경제 활성화를 위한 거점공간 봉제역사관은

❍ 총 연면적 499.12㎡  소규모로 가용공간을 최대활용(395㎡)하여 스토리로 연계되는 전체공간의 전시장화 운영 필요(전시콘텐츠 및 공간기획 용역결과, ’17.11월)

❍ 시민의 지속적 관심위해 킬러컨텐츠 연출위한 전시장 설계 및 설치용역 필요

□ 추진경위

❍ 봉제역사관 건립공사 착공	’16.12월

❍ 수탁자 선정 및 전시콘텐츠 개발 등 개관준비	’17.5.10~

❍ 봉제역사관 전시 콘텐츠 및 공간기획 용역추진	’17.8.1~11.30

- 소규모 봉제역사관의 가용공간 활용한 전공간의 전시장화 기획

❍ 봉제역사관 추진현황 부시장 보고	’17.12.11

- 공간구성 및 전시기획 : 봉제 과거–현재–미래 공간구성, 상설․기획전시장, 단추가게 –체험공간–팹랩–카페 등 전 공간의 전시장화 기획

- 아카이브 구축 : 창신동 특성반영한 스페이스텔링 및 봉제산업 콘텐츠 수집․디지털화

❍ 전시장 등 인테리어 설계․공사추진관련 심사 및 협의  ’17.12월

*******************************

① 신축공사와 중복되는 내부마감 및 인테리어 공사에 대해 도기본과 협의추진

② 주요 공종이 자체시행대상인 용역(전시장 설계,제작 등)인 경우 발주부서 자체 추진

************************************************************************************

‣ 전시물 설치 공사는 준공이후 가능하여, ’18. 3월 개관예정인 상황에서 ’18. 1월 준공은 필수사항으로 도기본 건립공사와 연계시, 설계변경에 따른 준공연장 불가피하여 개관일정 차질이 예견되는 바,

*********************************************************

***********************************************

<조달청 ‘일반용역 설명자료’ : 전시 및 행사대행용역>

각종 전시회 및 행사를 기획·조직하는 산업활동을 말합니다. 전시장 행사와 관련된 조사, 기획, 설계, 구성, 제작, 시공감리 등에 관한 전반적인 책임을 맡아 이러한 시설의 내장, 외장, 전시장치, 기계설비(음향, 영상 등) 등을 종합적으로 구성·연출하는 사업

Ⅲ		전시장 설치 추진계획

□ 추진방향

❍ 소규모 전시공간의 효율적 운영․연출위해 전공간의 전시공간화 구현

❍ 봉제산업의 과거-현재-미래로 연결되는 스페이스 스토리 구현위한 개관 전시장 설계 및 제작․설치 등 추진

□ 추진계획

❍ 사 업 명 : 봉제역사관 개관 전시장 설계 및 제작․설치 등 공사

❍ 기    간 : 계약체결일로부터 2018년 3월(3개월)

- 기본 및 실시설계 : 2개월 / 제작․설치공사 : 1개월

❍ 전시장 기획․설계

1) 계약방법 : 1인견적 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

서울시 수의계약 운영 개선계획, 2017 수의계약 제도 개선계획

- 사유 : 추정가격이 2천만원 이하의 소액이며, 사업현황을 잘 알고있고 유사  수행 실적이 있는 업체로, 견적의뢰 결과 저가를 제출하였기에 수의계약 하고자 함

2) 소요예산 : 16,500천원(부가가치세 포함)

- 예산과목 : 창신동 봉제박물관 조성, 시설비및부대비, 시설비

3) 설계 기본방향 및 업무 : 개관 전시장 연출 설계

- 전시장 기획공간 바닥, 벽, 천장 디자인 및 실시설계

- 설계 범위 내 전시장 등 모든 붙박이 가구 설계

- 전시장 기획공간에 대한 마감자재, 하드웨어, 조명기기, 이동가구에 대한 기기선정 및 구매 사양서

- 전시장 기획공간 전체 스케치업 상세 투시도, 일반 시방서 및 특기 시방서

- 전시장 전열 전등관련 배치도 및 위치도, 전등용량 파악 등

❍ 전시장 구성․제작 : 실시설계에 따른 전시콘텐츠 제작, 설치

1) 계약방법 : 제한경쟁입찰(서울시 소재업체 지역제한)

2) 소요예산 : 110백만원(부가기치세 포함) ※ ’18년 민간위탁사업비로 추진

3) 주요공사 내용

- 전시장 가설 및 철거

- 전시장 제작(벽체, 천장, 바닥 구성 및 보강, 자역광 가림막, 마감 등)

- 전시물품 거치대 조성 및 붙박이 가구 제작․설치 등

Ⅳ		향후계획

○ 2017.12월 2주	계약의뢰(재무과)

○ 2017.12월 3주 ~ 2018.	2월	설계용역 추진

○ 2018. 2월	공사추진(운영자)

붙임 : 봉제역사관 전시장 설계 과업내용서 1부.  끝.