세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(1회) 시행(보광배수지(1,2지) 내부방수·방식공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 “보광배수지(1,2지)내부방수·방식공사”에 대하여 아래와 같이 계약금액 조정 검토를 완료하고 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 보광배수지(1,2지)내부방수·방식공사

나. 도 급 자 : 우제이건설(주) 대표 김주연

다. 공사기간 : 2017.08.28. ~ 2018.05.26.

라. 변경사유 : 신규공종 및 시공물량 증·감 발생 (계약금액 변경)

마. 변경내역                                               (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도 급 비	897,012,760	1,046,000,000	증148,987,240
공급가액	815,466,146	950,909,091	증135,442,945
부 가 세	81,546,614	95,090,909	증 13,544,295

바. 예산과목

- 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(수선유지비)-22202

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 계약금액 조정결과 내역 등 관련서류 각 1부. 끝.

추산필 2017.12.13. 추산NO.20508. 은정호

주무관	최성태		주무관	은정호		급수운영과장	代박장진		중부수도사업소장	12/14 유경애
협조자	주무관	代최성태		주무관	이보민
시행	급수운영과-28890	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2158	/전송	3146-2189	/		/	부분공개(5)