문서번호	시설과-3930
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
강희진	장창원	진병규		12/14 이용태
협 조
	경리팀장		이전호

봉화황평분교가족자연체험시설공사(전기, 통신, 소방)

설계변경 검토보고

2017. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

봉화황평분교가족자연체험시설공사(전기, 통신, 소방) 설계변경 검토보고

○ 우리사업소에서 시행하고 있는 봉화황평분교가족자연체험시설공사(전기, 통신, 소방)에 대한 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고함

Ⅰ		계약현황

	전기	통신	소방	비고
공사명	봉화군황평분교가족자연체험시설 전기공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 통신공사	봉화군황평분교가족자연체험시설 소방공사
내용	전열, 조명	CCTV, 방송, 전화	자탐설비, 소화기
착공	2017.10.30	2017.10.30	2017.10.30
준공	2017.12.21	2017.12.21	2017.12.21
도급자	우진건설(주)권제원	우신통신(주)장성주	㈜산업전기소방 김진현
도급비	74,490,000	18,687,200	11,152,030

Ⅱ		설계변경내용

구분	당초	변경	변경사유	증감액 (천원)
전기	평상전열 12개	평상전열 20개	사업내용 변경(평상 12개⇒20개)	21,769
	보안등 6개	보안등 8개	캠핑장내 주요 위치에 2등 추가
	천장 형광등 기존유지	일부천장(다목적실) 등 교체	등 노후심해 천장재 작업시 교체
	기존 교사동 주 분전반 유지	교사동 분전반 LP-M 정비	전기부하 변동반영 기존 판넬 개조
통신	CCTV 4대	CCTV 5대	평상 8개 추가 운동장 감시용	589
	스피커 1대	스피커 2대	평상 8개 추가 운동장쪽 방송용
소방	소화기 12개	소화기 20개	평상 8개 추가로 소화기 수량증가	1,561
	수동발신기세트 교체	수동발신기 기존 재사용	상태양호, 정상동작(‘15년 보수)

Ⅲ		금액변경내용

(단위 : 원)

구분		당초	변 경	증/감	비고
전기	도급액	74,490,000	93,431,420	18,941,420
	조달구매	14,130,070	16,958,480	2,828,410
	소계	88,620,070	110,389,900	21,769,830
통신	도급액	18,687,200	19,276,680	589,480
	조달구매	20,405,390	20,405,390	0
	소계	39,092,590	39,682,070	589,480
소방	도급액	11,152,030	12,713,450	1,561,420
	용역설계	1,710,000	1,710,000	0
	소계	12,862,030	14,423,450	1,561,420
합계	전기+통신+소방	140,574,690	164,495,420	23,920,730

Ⅳ		예산검토

❍ 예산과목

- 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설조성운영, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

Ⅴ		공사 연기 검토

❍ 연기사유

- 현재 70%의 공정을 진행하고 있으나, 기온이 영하권인 동절기에 굴착공사가 어려운 상황으로 공사품질 향상 및 안전사고 예방을 위한 기간연장

❍ 준공기한 변경

- 전기, 소방

ㆍ당초 : 2017.10.26. ~ 2017.12.21.

ㆍ변경 : 2017.10.26. ~ 2018.02.28.

- 통신

ㆍ당초 : 2017.10.30~ 2017.12.21.

ㆍ변경 : 2017.10.30~ 2018.02.28.

❍ 지체상금 부과 검토

- 지체상금 부과여부 : 미 부과

Ⅵ		검토의견

❍ 상기 각  항목별 기 실정보고 사항에 대하여 설계변경 시행코자 함.

❍ 계약부서에 설계변경 시행 및 공사기간 계약변경 계약 요청.

❍ 예산조치 사항

- 공사비 증액분(23,920천원)은 공사 낙찰차액 및 추가배정액 사용

따로붙임 : 설계변경서 1부.  끝.