문서번호	도로보수과-12361
결재일자	2017.12.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	12/14 신응수
협 조

『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

설계변경(제3차) 검토 보고

2017 . 12.

북부도로사업소

[도로보수과]

『 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부 』

설계변경(제3차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중에 있는『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경(제3차)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 도로표지병 설치 3,600개, 과속방지턱 도색 2,100㎡,부속물 세척 6,814㎡, 중앙버스정류장 보도정비 9.5a

○ 공사기간 : 2017. 03. 06. ~ 2017. 12. 31.

○ 도 급 액 : 263,804,930원

○ 도 급 자 : *****************

Ⅱ		설계 변경 사유

○ 도로보수과-9097(2017.09.12.)호 『작업지시(4차)』에 따른 추석맞이 도로시설물 세척.

○ 도로보수과-9097(2017.11.03.)호 『작업지시(5차)』에 따른 노후포장구간 표지병 설치.

○ 도로 및 교통 부속물 순찰 지적사항, 120 민원사항, 관할 경찰서의 요청 사항에 따른 시공물량 변경.

Ⅲ		주요 변경 내역

○ 주요 공정 물량 변경 내역

연번	공종	규 격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	구조물 세척		㎡	6,814	10,821	증)	4,007
2	도로표지병 설치	단면	개	700	693	감)	7
		단면(야간)	개	1,500	2,240	증)	740
		양면	개	200	102	감)	98
		양면(야간)	대	1,200	1,572	증)	372

○ 변경금액

(단위 : 원)

구분		수 량		증·감
		당 초	변 경
총공사비		383,312,930	422,800,000	증) 39,830,422
도급비	공급가액	237,249,598	269,569,207	증) 32,631,747
	폐기물처리비	2,573,066	2,573,066	-
	부가가치세	23,982,266	27,214,227	증) 3,263,175
	계	263,804,930	299,356,500	증) 35,894,922
관급자재비		119,508,000	123,443,500	증) 3,935,500

- 예산과목

·(일반회계)안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로부속시설물 일상 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비(318,000,000)

·(특별교통회계) 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리, 교통안전 관련 도로부속물 유지관리,시설비 및 부대비, 시설비(104,800,000)

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고와 같이 물량 증가로 인해 부족한 공사비는 낙찰차액을 활용하여 예산범위 내에서 설계변경 시행하고자 함.

붙 임 : 설계변경(제3차) 내역서 1부.  끝.