투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	봉화황평분교 가족자연체험시설 공사(전기, 통신, 소방) 설계변경 및 준공기한 연기 의뢰

1. 시설과-3930(2017.12.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 『봉화황평분교 가족자연체험시설 공사(전기, 통신, 소방)』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 및 준공기한 연기 하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 봉화황평분교 가족자연체험시설 공사(전기, 통신, 소방)

나. 총공사비 : 금162,785,420원(금일억육천이백칠십팔만오천사백이십원)

(도급액:금125,421,550원/ 관급자재:금37,363,870원)

다. 공사기간 : 2017. 10. 26. ~ 12. 21.

라. 도 급 자 : 우진건설(전기) 권제원, 우신통신 장성주, 산업전기소방 김진현

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구분			당초	변 경	증/감	비고
전기	도급액		74,490,000	93,431,420	18,941,420
	조달구매		14,130,070	16,958,480	2,828,410
	소계		88,620,070	110,389,900	21,769,830
통신	도급액		18,687,200	19,276,680	589,480
	조달구매		20,405,390	20,405,390	0
	소계		39,092,590	39,682,070	589,480
소방	도급액		11,152,030	12,713,450	1,561,420
	용역설계		1,710,000	1,710,000	0
	소계		12,862,030	14,423,450	1,561,420
사업비계	전기+통신+소방	도급	104,329,230	125,421,550	21,092,320
		관급	34,535,460	37,363,870	2,828,410
		설계	1,710,000	1,710,000	0
		계	140,574,690	164,495,420	23,920,730

바. 예산과목

- 교육정책담당관, 학교지원 및 우수인재양성, 학교교육지원, 폐교를 활용한 가족자연체험시설 조성 운영,

시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

사. 준공기한 연기

- 전기, 소방

ㆍ당초 : 2017.10.26. ~ 2017.12.21.

ㆍ변경 : 2017.10.26. ~ 2018.02.28.

- 통신

ㆍ당초 : 2017.10.30~ 2017.12.21.

ㆍ변경 : 2017.10.30~ 2018.02.28.

아. 연기사유

- 동절기 굴착공사가 어려운 상황으로 공사품질 향상 및 안전사고 예방을 위한 기간 연장

자. 지체상금 부과건토

- 지체산금 부과여부 : 미 부과

붙  임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경 내역서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설관리팀장	장창원		시설과장	12/14 진병규
협조자
시행	시설과-3936	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	부분공개(5)