투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(제3차) 시행 -『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

우리사업소에서 시행중인 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(제3차) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2017. 03. 06. ~ 2017. 12. 31.

다. 도 급 자 : **************

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감		비고
총 공 사 비		383,312,930	422,800,000	증	39,487,070
		237,249,598	269,569,207	증	32,319,609
도급비	공급가액
	폐기물처리비	2,573,066	2,573,066		-
	부가가치세	23,982,266	27,214,227	증	3,231,961
	계	263,804,930	299,356,500	증	35,551,570
관 급 비
		119,508,000	123,443,500	증	3,935,500

마. 설계변경사유 : 도로 및 교통 부속물 정비 수량 변경에 따른 설계변경

바. 예산과목

- 안전총괄본부 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 도로부속물일상유지관리, 시설비

- 도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통안전관련도로부속물설치, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	조지웅		도로보수과장	김학동		북부도로사업소장	12/14 신응수
협조자	관리단속과장	박대군
시행	도로보수과-12399	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과	/
전화	02-944-5431	/전송	02-945-5072	/	99cjw99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)