문서번호	토목과-15089
결재일자	2017.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

지방시설주사		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
박찬선		조영두		박주완		12/14 김재겸
협조
	재무과장		임창윤
	계약팀장		양영종

★ ◉

『2017년 도로시설물 및 보도 유지보수 공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

2017. 12.

	성 동 구
	(토 목 과)

『2017년 도로시설물 및 보도 유지보수 공사(단가계약)』

설계변경(제3회-최종) 시행 보고

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명: 2017년 도로시설물 및 보도 유지보수 공사(단가계약)

❍ 위    치: 성동구 관내

❍ 공사기간: 2017. 3. 6. ~ 2017. 12. 31.

❍ 공사규모: 아스팔트 포장 정비 A=180a, 보도 정비 A=26a

과속방지턱 설치 L=300m, 구조물 세척 A=5,655㎡ 등

❍ 계약금액: 1,834,177천 원

❍ 계약상대자: 석진건설(주) 대표 조성록

Ⅱ		설계변경 내용

❍ 주요 변경내용

- 아스팔트 포장: 180a → 176a     - 보도 포장: 26a  →  20a

- 기타, 신규공종 및 목적물량 증·감

❍ 설계변경 사유

- 공사 추진에 따른 신규공종 발생 및 목적물량 증 ‧ 감

- 관련 부서 공사시행 협조 요청에 따른 목적물량 증 ‧ 감

※ 관련 근거

- 성동공유센터 보도교체 등 추가 공사 추진계획(사업비 10백만원)

{마을공동체과-6589호(2017. 11. 23.)}

❍ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	2,469,230,000	2,479,230,000	증	10,000,000
도 급 비	1,834,177,400	1,784,640,000	감	49,537,400
관 급 비	534,105,400	601,475,000	증	67,369,600
이 전 비	100,947,200	93,115,000	감	7,832,200

Ⅲ		조 치 의 견

❍ 공사 시행에 따른 변경사항에 대하여 상기와 같이 설계변경을 시행코자 함.

붙 임   1. 설계변경 내역서 1부.

2. 예산현황 1부.

3. 관련근거 각 1부.

4. 제비율 검증 확인서 1부.